과 업 설 명 서

계 약 명	충남음악창작소 시설기반 구축 실시설계 용역
주관기관	(재)충남문화산업진흥원

2016. 11.

www.ctia.kr

Ⅰ		과업개요

1. 과업개요

□ 사 업 명 : 충남음악창작소 조성 및 운영

□ 계 약 명 : 충남음악창작소 시설기반 구축 실시설계 용역

□ 계약기간 : 계약일로부터 ~ 45일

□ 기초금액 : 금23,500,000원(금이천삼백오십만원), 부가세 포함

□ 발주기관 : (재)충남문화산업진흥원(이하 ‘발주처’)

2. 목    적

□ 지역 음악산업 활성화를 위한 인프라 기반구축으로 다양한 장르 뮤지션들의 창작활동 지원과 시민 참여형 공연장 구축을 통해 뮤지션 및 예비음악인들의 연습, 교육, 창작을 위한 효율적 공간구성으로 창조적인 환경을 제공하고자 함

3. 과업의 범위 및 기간

□ 공간범위(충남음악창작소 조성 예정지)

‣ 위    치 : 충청남도 천안시 동남구 은행길 15

‣ 건물면적 : 5,520.1㎡(지하 2층, 지상 10층)

‣ 과업면적 : 1,147.57㎡(지하 1,2층, 지상 2층)

‣ 층별 주요시설

구분	실명	면적	활용용도
지하 2층	공연장	585.355㎡	무대, 관객석, 조종실, 창고, 준비실, 공용공간, 기계실 등
지하 1층	창고	23.1㎡	창고
지상 2층	오픈 홀	539.105㎡	오픈홀, 아카이브실, 녹음실, 제작조종실, 연습실, 사무실
합 계		1,147.57㎡

※ 기본설계 설명서 참고(각 실별 면적 등 필수 확인)

□ 설계범위(국토교통부 고시 ‘설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 자침’ 준수)

- 과업기간 : 계약일로부터 45일 이내

- 기본설계 도면 및 설계 설명서를 숙지하여 실시설계에 반영

- 과업범위

항목		내역
설계	음향설계	실내음향분석 수행 건축음향설계(실별 방음 수치 기준안 포함) 음향기계 설치 내역 ※ 음향기계 및 장비 첨부목록 참조
	실시설계	전기, 음향, 설비, 통신, 소방 설계
시스템 구축	냉․난방 시설 구축 설계/조명시설 구축설계 내․외 CCTV 구축 설계 건축음향/영상 음향기기 구축 설계
인·허가 취득	인허가 및 승인이 요구되는 목록 작성을 통해 인허가 취득에 성실히 노력

- 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며,

다음의 경우 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나. 발주처의 계획 변경 등 방침에 따라 본 과업 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다. 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

라. 기타 과업과 관련된 통념 상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

4. 공사예정 금액 : 750,000,000원(부가가치세 포함)

□ 기본설계에 따른 공사예가(참고사항)

※ 공사비는 실시설계 단계에서 변동될 수 있으나, 총 공사비는 750백만원을

초과할 수 없으며, 건축공사 비용 또한 500백만원을 초과할 수 없다.

Ⅱ		설계 일반지침

1. 일반지침

□ 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 관계법규 및 지침, 관련 시방서에 의거 발주처 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.

□ 과업수행 중 여건변동 등으로 변경이 있을 때에는 발주처와 협의하여야  하며, 과업범위 또는 내용의 변경, 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때에는 상호 협의하여 설계변경 할 수 있다.

2. 설계의 정의

□ 본 설계용역의 성과물은 충남음악창작소 시설의 구축을 위한 것으로서,

관련장비(악기 등)의 사용에 문제가 없고, 주변시설과의 소음문제 등을

고려하여 이해가 쉽도록 작성되어야 함

□ 관련 법령에 의한 각종 기술기준 및 인·허가 문제에 위배됨이 없어야 함

□ 기본설계 및 설계 설명서를 숙지한 후 실시설계에 임하여야 함.

3. 설계의 책임 및 손해배상

□ 설계도서는 용역수행자(용역업체)의 책임으로 작성하며 납품 후라도 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 현상변겅허가 불이행 등)로 인하여 발생되는 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 진다.(성과물 재보완 후 납품 포함)

4. 관련 개별법 규정 및 기준 검토적용

□ 수행기업은 제반 개별법 규정에 대한 저촉 여부를 판단하고 관계기관(인허가부서) 협의 후 규정에 위배됨이 없이 성과물에 반영하여야 하며, 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

5. 용역 참여 기술자

□ 수행기업은 용역에 참여한 기술자의 성명, 담당업무와 참여기간, 재직증명 등에 관한 사항을 기록한 분야별 참여기술자 명단을 착수와 동시에 제출하여야 하며, 참여 기술자의 변경이 있을 경우에는 지체없이 변경내용을 통보하여야 한다.

6. 현장조사와 자료수집

□ 수행기업 책임 하에 사전 현장조사 및 관련 자료수집은 완벽하고 충실하게 수행하여야 하며, 사전 조사 불충분으로 인한 부실한 성과물에 대한 책임은 용역수행자(용역업체)에게 있다.

7. 성과물의 소유권 및 저작권

□ 용역에 의해 생성된 현장 조사자료, 시험성적서, 보고서, 납품성과물 등 일체의 성과물은 발주처가 소유권과 저작권을 가지고 있으며 발주처의 승인없이 임의 유출이나 제3자에게 제공할 수 없다.

□ 사업수행 결과물과 관련하여 발생하는 제3자의 저작권 도용, 초상권 침해 등 제작 시 타인의 지적재산권을 침해함에 따른 분쟁에 대하여 그 시기에 상관없이 수행기업은 민‧형사상 모든 책임을 져야 한다.

8. 건축분야 설계지침

□ 수행기업은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

□ 건축분야는 기본설계의 도면 및 설명서를 참고하되 필요시 발주처 협의를 통해 변경할 수 있다.

□ 국내의 유사 공연장 및 시설 등을 참고하여 과업에 부합한 실시설계가 이루어질 수 있도록 관련 자료를 수집 분석한다.

□ 충남음악창작소 이용객의 편의와 효율적 운영을 위한 최선의 계획을 고민하여야 하며, 노약자, 장애인 편의시설에 대한 설계를 포함한다.

□ 각종 기자재의 단가는 조달청의 시설자재 단가를 우선 적용한다.

9. 기계설비 분야 설계지침

□ 수행기업은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

- 공조시설 현황파악(기존 공조시설 검토 및 간섭 등 확인)

- 실시설계에 필요한 자료 수집 및 검토

- 도면 및 부하용량 계산서 작성

- 자재규격서 및 시방서 작성

- 수량산출서 및 설계 내역서 작성

- 기타 설계에 필요한 사항

□ 설비기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 준수하여야 한다.

□ 설계도서는 도면, 시방서, 보일러, 냉·난방부하계산서, 소요자재의 용량 계산서 및 장비의 용량계산서 등을 포함한다.

□ 기계설비 장비에 관련되는 건축, 전기, 무대시설에 있어 분야별 업무범위 구분을 명확히 하여 도면 또는 보고서에 표기하여야 한다.

□ 방화안전시설 설치하도록 설계에 반영하여야 한다.

□ 각종 기자재의 단가는 조달청의 시설자재 단가를 우선 적용한다.

□ 공연장 냉·난방 시스템 적용 시 기 설치된 설비와의 간섭 등이 발생할 수 있으므로, 기술적인 검토와 충분한 사전협의를 거치도록 한다.

10. 전기분야 설계지침

□ 전기설계는 안정성, 신뢰성, 경제성 및 정확성을 기함으로서 능률적이고 양질의 설계가 되도록 한다.

□ 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 의거 작성하여야 하며, 신고 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

□ 설계도에는 관련분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 한다.

□ 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재단가를 최우선 적용한다.

□ 소방설비(전기부분)

- 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 소방설비 및 제반설비(감지기 등)를 검토하여 설치할 것

- 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것

11. 정보·통신 설계지침

□ CCTV, 옥외 보안등 및 외곽방범 설비도 통합설비계획에 포함하여 계획하여야 한다.

12. 건축음향 설계지침

□ 차음설계

- 각 실의 정숙도를 확보하기 위해서는 기본적으로 외부로부터 침입하는 소음을 차단하고, 외부로 음을 누출시키지 않도록 차음구조를 검토한다.

- 실내외의 소음 전달 경로를 파악하여 경계벽, 경계 바닥의 목표하는 차음성능을 검토한다(사운드 브릿지 등에 의한 차음성능 저하 경로를 파악)

- 차음설게는 부족설계나 과잉설계가 되지 않도록 기능과 경계적인 면을 고려한다.

- 실내소음 권장 NC 등급

실의 종류	NC 등급
콘서트홀	NC - 15이하
다목적 홀	NC - 20~30
다목적 이벤트 공간	NC - 35~45
녹음실	NC - 15~25
TV 스튜디오	NC - 20~30
라디오 스튜디오	NC - 15~25
극장	NC - 20~30

- 각 실별 실내소음 목표 NC 등급

실명	NC 등급
스튜디오	NC - 20
조정실	NC - 25
공연장	NC - 25
개인연습실	NC - 25
밴드연습실	NC - 25

※ 공간계획에 따라 달라질 수 있음.

□ 방진설계

- 소음진동 방진 설계를 필요로 하는 실(이하 수음실)의 실내허용, 소음레벨,소음진동원 음원의 발생음, 가진력 설정, 수음실에 대한 소음진동 전반경로의 검토를 실시하여 필요소음 진동 저감량을 설정한다.

- 필요진동 저감량을 설정할 때 다음의 표시한 설정이 필요하다.

‣ 수음실의 실내허용 소음레벨의 설정

‣ 진동원의 가진력 설정

‣ 진동원의 설치 바닥의 강성(구동 점의 임피던스 혹은 어드미턴스)의 산출

‣ 음향 방사 특성

- 소음진동 방진 사양 결정

‣ 필요소음 진동 저감량을 설정한 뒤 방진재료의 특징을 충분히 이해해서

사양을 결정해야 한다.

- 방진재의 특성

구 분	공기스프링	코일스프링	방진고무	GLASS WOOL	방진PAD
실용 가능한 고유진동수	1~3	2~6	6~15	10~30	15~30
감쇠비율	0.1~0.2	0.005	0.05~0.1	0.05~0.1	0.05~0.1
저주파수(30Hz이하) 방진효과	우수	양호	가능	문제 있음	문제 있음
고주파수(30Hz이상) 방진효과	우수	가능	양호	양호	문제 있음
가진력이 큰 기계에 적용	우수	양호	가능	가능	문제 있음
내구성	양호	우수	양호	가능	가능
내후성(내수, 유성)	양호	우수	가능	문제있음	가능
보수성	문제 있음	우수	우수	가능	양호
비용	비싸다	조금 비싸다	중간	중간	싸다

□ 실내음향설계

- 실별 적정 잔향시간(500Hz 기준)

실명	목표 잔향시간(sec)
스튜디오	0.35
조정실	0.25
공연장	0.70
개인연습실	0.25
밴드연습실	0.25

- 각 실별 음향 파라미터, 차음량 산출 및 적정성 검토는 건축음향 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 결과를 제출한다.

- 건축음향 마감 계획 지침

실명	건축마감계획
스튜디오	- 음원의 손실 없이 녹음할 수 있는 공간마감 계획 - HIGH FIDELITY를 재현하는 음장을 조성하고 연주를 도와주는 환경이 될 수 있도록 계획
조정실	- 음원은 MONITOR SPEAKER이고, 수음점은 MIXING POINT로 이위치관계를 전제로 한 음장 마감 계획을 한다. - 연주의 형태나 MIC배치를 고려하여 반사성의 재료를 기본적으로 연주자의 뒷 벽면으로 배치하고, 그 위의 천장부분에 확산체를 설치함으로 해서, 직접음에 유효한 반사음을 시간 지연 없이 녹음 가능 하도록 한다.
공연장	- 100~150석 규모의 작은 공연장으로 다목적의 용도를 가질 수 있도록 마감 계획을 한다. - 음향왜곡 현상이 없도록 면밀히 검토하여 마감 형태 및 계획을 한다.
개인연습실	- 작업에 해가 되기 쉬운 저음역성분의 증폭현상을 경감하기 위해서 흡음재를 천장이나 벽면 마감재의 배후의 공기층 내에 사용한다.
밴드연습실	- 작업에 해가 되기 쉬운 저음역성분의 증폭현상을 경감하기 위해서 흡음재를 천장이나 벽면 마감재의 배후의 공기층 내에 사용한다.

※ 마감계획은 협의하여 변경할 수 있음.

- 각 실별 음향 파라미터, 차음량의 적절한 시공 검토를 위하여 준공 검사 시 건축음향 측정을 실시하여 성능 검토를 진행하고, 건축음향측정 보고서를 제출한다.

13. 소방설비 설계지침

□ 인허가 사항

- 시공 전 소방서에 설계도서와 함께 설치 신고를 하고 공사완료 후 소방서로부터 소방 시설에 대한 적합 여부를 검수 후 완비 필증을 취득한다.

- 바닥면적이 300㎡ 이상인 경우에 적용되는 “소방법규”의 ‘소방기술기준에 관한 규칙’의 별도 규칙을 준수한다.

- 스프링클러 소화설비 : 각 실별 스프링클러 소화설비를 신설하되 기존 건물의 배관에서 분기될 수 있도록 계획한다.

- 자동화재탐지설비

‣ 연기, 열, 감지기 : 기존 건물 설비에 준하여 설치한다

‣ 유도등 : 비상탈출구, 통로유도등을 설치한다

‣ 시각경보장치를 설치한다.

Ⅲ		과업 일반지침

1. 일반사항

□ 설계도면은 Auto CAD로 작성하여야 하며 CD를 포함 제출한다.

(모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되 ‘건설기술진흥업무 운영 규정 제59조에 따라 단체표준으로 공고된 건설 CAL/EC 전자도면 작성표준에 따른다)

□ 신기술 사용이나 구조물 부위 중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며 시공시 필요한 시공 상세도면을 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

□ 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공 시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절내의 “특기사항” 또는 공사시방서의 “특별사항”내에 필히 작성되어져야 한다.

2. 공사시방서 작성

□ 공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(Claim)이 발생되지 않도록 공사중 유의사항을 작성하여야 한다.

□ 공사시방서는 국토교통부제정 표준시방서 및 기타 본 공사의 시행과 관련하여 작성하되 발주청의 규정에 적합하게 공사시방서를 작성하여야 한다.

□ 본 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 “특기사항”에 상세하게 각각 기술하여야 하며 개별 항목에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 “특별사항”이라는 제목(Title)으로 그 내용을 각각 상세히 작성 기술하여야 한다.

□ 본 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성 시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련하여 필요한 내용은 공사 시방서에 포함되어야 한다.

□ 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 특기사항로 구분하여 작성하되 분야

별로 작성하여야 한다.

□ 특기 사항에는 상세도면으로 표시할 수 없는 주의사항에 대해서 설명하   여야 한다.

3. 설계도서 작성

□ 설계도서는 관련법규와 제반 규정 등 본 과업지시서에서 제시한 기준 이상으로 작성하여 설계 책임기술자의 서명 날인을 하여야 한다.

□ 각부 치수를 명확하게 표기하며 관련법의 각 제도통칙에 의하여 설계도서 표기한다.

□ 기본계획에 대한 실시설계 용역 과정에서 생기는 질의사항에 대해 협의하며, 필요시 추가 도면을 작성한다.

□ 설계하는 사용자재는 국산품(KS)을 원칙으로 하며, 건축물의 기능상 필요하거나 국산품으로 대체 사용이 불가할 경우 품질의 우수성이 탁월하다는 객관적인 자료(시험성적서 등)에 의해 입증되는 등에 한하여 외산자재를 사용할 수 있다.

□ 수행기간 중 설계도면 미비 및 부적합 부분, 산출근거 상이 등의 발주처 공사감독관의 설계변경 요구 시 수행기업은 즉시 설계변경 도면을 작성하여야 한다.

4. 공사비 산출

□ 공사비 내역서는 조달청에 사용하는 프로그램과 호환이 가능한 프로그램으로 작성한다.

□ 공사비는 조달청에서 적용하는 단가를 기준으로 하고 정부표준품셈에 따라 산출하되,

□ 표준 품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 실적공사비 등 전산   참고자료를 이용할 경우에는 반드시 관련 근거를 명시하여야 하며, 기타   사항은 견적서를 첨부하여 실제거래가격을 적용한다.

□ 전문분야(공종)별로 작성하고, 공용화되지 않는 품목은 상세도에 의거    일위대가를 산정 하여야 한다.

□ 제조원가계산에 의할 수 없는 공종의 단가는 일식 견적으로 단가를 계   산하고 반드시 견적서를 첨부하여야 한다.

□ 노임단가는 정부 고시 설계 당월 노임단가를 적용한다.

□ 견적에 의한 적용단가는 2개소 이상 비교하여 가격이 저렴하고 품질이   우수한 적정한 단가를 채택하되 관련서류와 선정 근거를 첩부한다.

□ 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 불가피하게   일식으로 적용되는 단가에는 충분히 납득이 될수있는 자료를 첨부하여야 한다.

□ 적산은 납품일에 가장 가까운 달의 가격을 기준으로 하되 최소한 3가지   이상의 물가자료를 조사하여 가장 낮은 기준으로 적용한다.

5. 용역성과품 납품

□ 성과품 납품시기

- 성과품의 납품은 최종성과품으로 납품한다.

- 최종성과품중 설계도는 납품기한 5일 이전에 제출하고, 설계도 이외의 성과품은 설계도 접수 이후 과업수행 종료일 이내에 납품하여야 한다.

(전기, 소방, 통신 포함)

※ 상기 성과품의 제출일정은 발주처와 수행기업이 상호 협의하여 조정할 수 있음.

□ 최종 성과품 종류 및 납품부수

- 다음 항목을 포함하여 CD로 작성하되 설계도면은 AUTO CAD system을 이용 작성한다.

- 제출되는 모든 서류는 건축, 기계설비, 전기 등 각 공사분야별로 분리하여 작성‧제출한다.

※ 성과품의 종류 및 소요부수는 발주처와 수행기업간 상호 협의하여 조정할 수 있음.

종 류	규 격	부 수	비 고
실시 설계 백도면(A3) ※인테리어 설계도면 및 투시도(4면 이상) 포함	A3 반접	5	- 제출 서류의 규격 및 수량은 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.
공사 시방서	A4	5
공사 내역서(일위대가표 포함)	A4	5
단가 산출조서	A4	5
수량(물량) 산출조서	A4	5
자재내역 및 시방서(일반 및 특기시방)	A3	5
유지관리지침서 (분야별 통합본) 기타 관계부서 협의용 도면	A4 -	3 소요량
음향분석 결과	A3	5
설계결과보고서(협의과정 및 내용포함)	A4	5
CD	상기내용전체	2

6. 기타사항

□ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 법규를 준수하며, 발주처가 요청하는 소정의 서류를 갖춰, 계약절차를 진행하여야 한다.

□ 설계도서 작성은 원고와 원도를 작성하여 준공기한 3일전까지 발주처 감독자(업무담당자 및 발주처 지정 감독관)의 사전 검사를 받은 후 복사하여야 한다.

□ 수행기업은 과업 수행시 발생되는 문제점 등에 대하여 발주처와 협의하여 해결하고 상충되는 사항이 있을 시에는 발주처의 방침 및 추진방향에 따라야 한다.

□ 보안사항 : 수행기업은 과업수행에 참여하는 관계자에 대하여 제반 보안절차를 이행하여 보안대책을 수립하고, 보안각서를 제출하여야 한며 보안관련 문제가 발생되었을 경우 민‧형사상 모든 책임은 수행기업이 진다.

□ 준공금(대금)은 검수완료 후 청구 및 지급함을 원칙으로 한다.

□ 다음 표에 해당하는 경우, 본 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

○ 정당한 사유 없이 약정한 착수 기일을 경과하고도 착수하지 아니할 경우

- 계약일로부터 7일 이내에 진흥원 요청 서류(별도 안내) 제출 및 보고

○ 과업지시서에 명시한 계약기간 내에 세부행사 집행계획에 의한 일정에 따라 완료되지 못하거나,

수행기업의 귀책사유로 과업완료할 가능성이 명백히 없다고 인정되는 경우

○ 계약내용과 실제 과업을 다르게 수행할 경우

○ 발주처의 사전 승인 없이 과업내용을 임의로 변경하는 경우

○ 과업수행과정에서 발주처의 정당한 요구를 이행하지 않을 경우

- 상기 사항에 해당할 경우 발주처는 수행기업에 과업중단 지시, 기 지급된 대금의 환수,

손해배상 등을 요구할 수 있으며, 수행기업은 발주처의 처리에 성실히 응하여야 함

□ 하자책임 및 하자기간 : 하자기간은 용역성과품 검수일로부터 본 공사 준공시까지로 하되, 수행기업의 명백한 과실로 인해 문제점이 발생 될 경우 하자기간에도 불구하고 수행기업은 이를 무상으로 성싷히 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

□ 다음 표에 해당하는 법규 및 제반규정을 준수하여 설계하여야 한다.

○ 건축법 및 건축사법, 동시행령 및 동시행규칙, 관련규정 및 기준

○ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙   ○ 극한강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준

○ 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙  ○ 산업안전보건법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 소방법, 동시행령, 동시행규칙,  관련규정 및 기준  ○ 전력기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전기사업법, 동시행령 및 동시행규칙  ○ 전기공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 한전공급 규정  ○ 전기용품 안전관리법, 동시행령

○ 폐기물관리법 관련 규정 및 기준  ○ 대기환경보존법 및 수질환경보존법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전기통신법, 동시행령 및 동시행규칙  ○ 에너지이용 합리화법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 수도법 및 하수도법, 동시행령 및 동시행규칙  ○ 주차장법 관련규정 및 기준

○ 건설교통부제정 건축공사 표준시방서, 서울특별시 전문시방서

○ 건설부교통제정 건축설비공사 표준시방서  ○ 오수, 분뇨 및 축산폐수에 관한 법률

○ 건설교통부제정 토목관련공사 표준시방서 및 설계시공 지침  ○ 건설교통부제정 조경공사 표준시방서

○ K.S 규준  ○ 건설교통부제정 건축표준상세도

○ 고압가스 안전관리법 및 도시 가스업법 관련법규 및 기준  ○ 영. 유아보육법, 동시행령, 동시행규칙

○ 장애인. 노인. 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률, 동시행령, 동시행규칙

○ 기타 정부관련 법규(공고, 고시, 예규, 지침 등) 및 지방자치단체 조례방침  ○ 도시계획사항 등