제 안 요 청 서

(과업지시서 포함)

용 역 명	충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역
발주기관	(재)충남정보문화산업진흥원

2020.  12.

www.ctia.kr

1		용역개요

1. 용역의 명칭

본 과업의 명칭은『그린 스타트업 타운 조성 설계 용역』이라 한다.

2. 용역대가

본 용역금액은 대상 공사 총액 추정가격 3,034,000,000원에 해당하는 공사에 대한 설계로『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에 의거 168,000,000원(VAT 포함)으로 한다.

3. 과업의 목적

본 과업은 스타트업 증가율 대비 부족한 지원과 인프라를 도시재생혁신 지구와 연계하여 ‘창업․주거․여가․문화’가 복합된 그린스타트업타운 조성을 추진함에 있어 창의적인 입주 및 지원공간, 네트워크 공간 등을 미래지향적으로 배치하여 쾌적하고 실용적인 시설 마련을 위한 실시설계를 목적으로 한다.

4. 과업대상 건축물 개요

가. 건물 개요

구분	주요내용	참고 이미지
부지면적	3,479.8㎡
연면적	3,443.5㎡
설계범위	어울림타워 2층~5층
5층(218.8㎡)	휴게실, 소회의실, 루프탑 등
4층(779.2㎡)	중·소회의실, 입주실 등
3층(1,411.3㎡)	서버실, ICT 융합센터 등
2층(1,034.2㎡)	대회의실, 운영사무실 등

※ 각 층별 주요내용은 사업계획에 따라 변경 가능

나. 과업대상 면적

도시재생어울림타워 중 1층, 5층 ~ 18층을 제외한 2층에서 5층까지의 건물 범위.

5. 과업의 기간

가. 설계업무는 기본설계와 실시설계로 구분하고 기본설계기간은 계약체결일로부터 30일 이내로, 실시설계기간은 계약체결일로부터 100일 이내로 한다. 다만, 관계법령 및 발주처의 사정에 의한 지연사유 발생 시 발주처와의 협의를 통하여 과업기간을 조정할 수 있다.

ㅇ 기본설계 : 계약체결일로부터 30일 이내 기본설계(안)을 제출(2개 이상)하고 발주처의 승인을 득한 후 실시설계 실시

ㅇ 실시설계 : 계약체결일로부터 100일 이내 실시설계도서 제출

나. 과업수행 완료 전(후)라도 과업수행과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 과업수행 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.

6. 과업의 범위

가. 설계업무의 범위는 기본설계 및 실시설계, 준공도서 검수와 승인, 관련법령에 의한 사용승인의 신청 대행 등으로 실시설계는 시공 가능한 세부적인 공사비 산정을 포함한다.

나. 다음 사항을 설계의 기본 과업으로 한다.

(1) 건축 설계 : 본 건물 일체에 대한 설계 등(주요시설 인테리어 설계)

(2) 전기설비 설계 : 설계에 따르는 전기설비 전반, 전기소방설비 등

(3) 기계설비 설계 : 설계에 따르는 기계설비 전반, 기계소방설비 등

(4) 정보통신 설계 : A/V시스템, CCTV설비, 출입통제시스템, 전화, 인터넷 등

(5) 기타 : 관계법령 및 본 건물 유지관리상 필요한 시설 설계 등

다. “나”항의 기본업무 및 관련법령에 의한 업무 외 다음과 같은 업무가 계약상대자의 업무에 포함된다.

(1) 과업대상 건축물의 현장조사 및 검사, 보고서 작성․제출에 관한 업무

(2) 관련법령 및 본 건물 유지관리 지침상 협의 및 인․허가에 필요한 서류 작성․제출 등의 업무

(3) 시공사 선정을 위한 입찰행정지원업무(입찰서류일체 작성포함)

(4) 해당공사 중 사후설계 관리업무(현장 상황에 맞는 설계도서 지원 포함)

(5) 필요시 준공도서 검수 및 승인

(6) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항과 발주기관이 설계완수를 위하여 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

7. 과업에 대한 제안요청

그린 스타트업 타운조성 기본방향 및 실시설계건축도면을 참조하여 디자인 컨셉 제안

충남(천안) 그린 스타트업 타운 조성(안)

□ 조성 콘셉트

❶ 미래 친환경 모빌리티, 정밀의료 분야 등의 스타트업 육성을 위한 종합적인 기능을 제공하는 창업지원 공간

- 스타트업의 발굴·성장 지원을 위한 「오픈 이노베이션」이 활발하게 일어나는 공간 조성

❷ 스타트업 및 국내‧외 VC/AC의 쾌적한 입주공간 및 투자유치·교류가 가능한 라운지 및 IR 공간 등 조성

- 개방형, 독립형, 반개방형 등으로 공간을 구분하여 기업 규모·성격, 성장단계 등에 따라 입주공간 배정 및 입체적인 공간 활용

- 1인 스타트업 및 예비 창업자가 활용할 수 있는 코워킹 공간 조성

- 스타트업 및 VC/AC의 개별 수요에 대응할 수 있는 충분한 회의실 및 네트워킹, 아이데이션 공간 조성

❸ 스타트업 및 연구기관, 시민 등에 특화된 빅데이터·인공지능 플랫폼을 제공하는 ICT 융합센터 조성

❹ ‘일, 문화, 여가’를 한 공간에서 누릴 수 있는 그린-디지털 혁신공간으로 공간 디자인

□ 조성위치 : 충청남도 천안시 서북구 와촌동 106-17번지 일원

□ 조성규모 : 도시재생어울림타워 2~5층(4개층)

부지면적	연면적	층	주요시설
3,479.8㎡	218.8㎡	5	휴게실, 소회의실, 루프탑 네트워크 파크 등
	779.2㎡	4	중‧소회의실, 입주실, 공유오피스 등
	1,411.3㎡	3	ICT 융합센터, 클라우드센터(서버실), 중·소회의실, 입주실 등
	1,034.2㎡	2	대회의실(IR룸), 중‧소회의실, 입주실, 운영사무실 등
3,479.8㎡	3,443.5㎡

※ 실시설계 및 입주 기관‧기업에 따라 구성도는 변경될 수 있음

※ 향후 그린 스타트업 타운으로 추가 조성되는 INNOST타워(20층 규모, 어울림타워 인접)와 인근 기능시설(교통환승센터, 주상복합시설 등)과의 연계를 고려할 것

□ 입주실 주요 조성내용

층	입주실				회의실
	오픈공간 (30석)	4인실	6인실	10인실	소회의실 (8인)	중회의실 (20인)	대회의실 (50인)
5	-	-	-	-	2실	-	-
4	30석	-	5실	-	1실	2실	1실
3	-	-	5실	3실	2실	-	-
2	-	3실	4실	-	3실	1실	1실
소계	30석	3실	14실	3실	8실	3실	2실
합계	30석 / 20실				13실

※ 각 층마다 간단한 업무, 공용OA·장비실 및 손님 대기실, 회의장소로 활용 가능한 사무·휴게공간 조성

※ 공간별 가구 배치 및 구성 제안

※ 실시설계에 따라 시설 규모 및 개수는 변경될 수 있음

□ 주요시설 및 수용규모

시설명	용도	주요장비	수용규모
개방형 입주실	가변 개방형 1인실 기준	테이블, 의자 및 개인수납장	30석
독립형 입주실	독립형 업무공간 (4인실/3개, 6인실/14개, 10인실/3개)	테이블, 의자 및 업무공간	20실
회의실	회의 및 업무협의 공간 [소회의실(화상회의실 1실포함), 중회의실, 대회의실(라운지 1실 포함)]	테이블, 의자, 전자교탁 등	13실
운영사무실	업무지원 운영사무실	테이블, 의자 등	2실
클라우드센터	서버실	서버 네트워크 관련 장비	1실
휴게실	입주인원 휴게공간	싱크대, 냉장고, 전자레인지 등	1실
ICT융합센터	빅데이터 열람실	테이블, 의자, 컴퓨터 등	1실
루프탑 그린파크	입주인원 휴게 및 문화향유공간	벤치, 차양막 등	1식

□ 조성 위치 및 계획

조성 위치
조성 계획

※ 실시설계건축도면(평면도)은 별첨자료 참조

※ 실시설계건축도면 자료 내 공간배치는 공용공간(계단실, 화장실 등)을 제외하고 공간조성(안)에 근거하여 전면 재구성 가능

※ 기타 필요한 도면자료의 경우 개별문의(041-620-6456)

2		과업수행지침(공통)

1. 일반사항

가. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있는 경우

(2) 발주처의 정책변경 및 계획변경 등으로 과업중단 또는 현저한 과업의 증감이 있는 경우

(3) 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항이 발생하여 변경이 불가피한 경우

(4) 기타 과업과 관련하여 각종 심의 등 절차이행 및 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되는 경우

나. 본 과업의 수행도중 변경사유가 발생할 때는 예산의 범위 내에서 발주처와 과업수행자가 상호 협의하여 과업을 변경할 수 있다.

다. 과업수행자는 본 용역과 관련하여 발주처가 제공한 각종 자료 및 성과품에 대하여 다른 용도로 활용할 수 없다.

라. 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 각종 안전에 유의해야 하며, 사고 발생 및 제3자에게 피해를 주었을 경우와 제3자의 권리(특허권 등)를 사용하였을 경우에는 용역수행자가 그에 따른 비용부담 등 일체의 책임을 져야 한다.

마. 보고서 작성은 한글, 아라비아숫자, 미터법을 원칙으로 하며, 한문 또는 영문 등의 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기하여 수록한다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 제반 관계법령 및 정부, 지자체 규정에 부합하도록 성과품을 작성하여야 하며, 과업완료 전까지 발주처의 사전 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

2. 과업수행자

가. 본 과업은 고도의 전문성이 요구되므로 과업수행자는 각 분야별로 학식과 경험이 풍부한 숙련된 전문가와 기술자로 수행팀을 구성하여 본 과업이 원활하게 수행될 수 있도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 과업지시서 및 발주처의 지시와 제반규정에 따라 당해 프로젝트 책임자 및 연구원의 책임 하에 성실히 수행하여야 한다.

다. 본 과업 목적달성에 필요한 분야를 종합적으로 분석하되 본 과업범위에 명시된 것은 물론이고 과업 수행에 필요하다고 판단되는 추가 업무에 관하여도 성실히 과업을 수행하여야 한다.

라. 본 과업 수행 중 과업참여 인원은 발주처의 승인 없이 교체할 수 없으며, 수행자나 대리인이 과업수행에 부적합하다고 인정되는 경우에는 발주처는 감독관은 교체를 명할 수 있으며, 용역수행자는 즉시 이에 따라야 하고, 용역수행자가 참여 기술자를 교체하고자 할 때에는 발주처의 사전승인을 받아야 한다.

마. 과업수행자은 업무의 원활한 수행 및 업무흐름의 공유, 업무의 중복과 혼란을 막고 일관된 업무의 수행을 유지하기 위해 분야별 전담 책임자를 선정하여 발주처와의 창구를 일원화해야 한다.

바. 과업수행 착수계에 제출된 인원이 본 과업 수행에 기술적·양적으로 부족하다고 발주처가 판단할 때에는 용역사와 사전 협의를 통해 적정한 인원을 충원하여야 한다.

사. 본 과업은 제출된 예정공정표 대로 수행하여야 하며 공정의 변경이 필요할 경우 수시로 발주처와 협의하여 승인을 받은 후 수행한다.

아. 과업수행자는 과업이 종료되더라도 여건 변화에 따른 계획 변경에 대한 재검토 및 자문 요청 시 대가없이 이에 응하여야 한다.

자. 다음의 사유가 발생하였을 경우에는 과업 수행 상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거하여 조치할 수 있다.

(1) 수행인력 부족 또는 수행능력이 현저히 저하되어 성과품이 불가능하다고 인정될 때

(2) 과업기간 내에 과업을 완료할 능력이 없다고 판단될 경우

(3) 발주처의 제반 지시사항에 불응하여 과업을 진행한 때

(4) 과업수행 중 부주의 등으로 잘못이나 허위사실을 기재한 경우

(5) 기타 계약조건을 위반한 때

차. 과업수행자는 과업수행 중 발주처가 요청하는 제반 절차 수행을 위한 보고, 심의 등의 절차를 적극 수행하여야 하며, 또한 자료제출, 발표자료 준비, 발표(보고) 등의 업무를 수행하여야 한다.

3. 착수계 및 공정보고

가. 과업수행자는 계약체결일로부터 14일 이내에 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 대리인계, 과업수행 계획서, 과업수행 조직명단(과업수행자 명단, 이력서, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본, 보안각서 등 포함) 등 발주처에서 정한 과업수행에 필요한 제반서류를 발주처의 사전검토를 거친 후 제출하여야 한다.

나. 과업수행자는 예정공정표에 의거 과업내용을 총괄 검토하여 주간계획 및 추진실적을 매주 발주처가 별로로 정한 기한까지 서면으로 제출하여야 한다.

다. 본 과업 수행기간 중 발주처와 과업수행자는 월2회 이상 추진현황 및 실적, 차주계획에 대한 업무협의를 하여야 한다.

라. 매월 마지막 주 중 발주처가 별로로 정한 기한까지 월간 과업수행 내용과 익월 예정공정을 상세히 기술하여 보고하여야 한다.

4. 보고회 및 업무협의

가. 착수 보고회 : 계약일로부터 14일 이내

나. 중간 보고회 : 용역수행 50~90% 진척 시(예정공정표에 의한 진척사항과 중간결과 등을 종합하여 보고)

다. 수시 보  고 : 발주처 요청 시(부문별·단계별 과업 진척상황, 과업수행계획,

계획구상안 등에 대하여 보고)

라. 최종 보고회 : 용역수행 90~100% 진척시(각종 보고, 협의 결과  발주처 검토결과 보완·지시된 사항과 성과품 작성을 위한 최종적인 결과를 종합하여 보고)

마. 과업수행 책임자에 의해 착수 보고회, 중간 보고회, 최종 보고회를 실시하여야 하며, 보고 횟수 및 보고 시기는 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

바. 발주처에서 과업수행 내용에 대하여 문제가 있다고 판단, 재보고회를 개최토록 요구할 때에는 과업수행자는 자신의 부담으로 이에 따라야 한다.

사. 과업진행 및 세부내용 검토관련 발주처의 요구가 있을 때에는 필요한 자료제출 또는 별도로 보고하여야 한다.

아. 각종 보고서 및 자료 등은 제출 전 발주처의 사전검토를 거쳐야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 용역수행자의 부담으로 하고, 사전 협의 및 검토 의견과 문제점은 보완하여야 한다.

자. 발주처가 요청할 경우, 과업 세부 진척사항 등을 작성하여 서면으로 보고하여야 하며, 발주처가 필요하다고 인정할 때에는 과업 진행경과 및 성과에 대한 보고와 협의를 과업수행자에게 수시로 요구할 수 있으며, 과업수행자는 이에 응하여야 하고 그 협의 결과를 과업수행에 적극 반영해야 한다.

차. 업무협의는 필요할 경우 상호 요청에 의해 수시로 개최 할 수 있으며, 보고회 등 공식적 회의 및 각 실무협의 개최 시 회의 안건 및 회의록을 작성하여 발주처의 승인을 받도록 한다.

5. 성과품 납품

가. 성과품은 발주처의 사전 검토(사전검토에 소요된 기간도 본 과업기간에 포함)를 받아 작성하며, 검토에서 지적되는 사항은 즉시 수정하여 성과품을 재작성해야 하며, 보고서는 최종 승인 후 발주처의 지시에 따라 작성한다.

나. 과업수행자는 성과품납품보고서(안)를 준공(납품) 예정일 5일전에 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 조판에 임하고, 각종 성과품의 수록내용 및 편집순위 등에 대하여는 관련 지침 등을 따르되 사전에 발주처와 협의하여야 한다.

다. 성과품 작성 시 한글, 한자, 영어를 혼용하여 작성할 수 있으나 한글 사용을 원칙으로 하고, 한자 및 영어는 병기, 숫자는 아라비아 숫자로 한정하며, 미터법을 사용하도록 한다.

라. 성과품은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙(단, 그림 및 조감도, 도면 등은 제외)으로 하되 필요에 따라 A3 또는 적절한 크기의 용지로 변경하여 사용할 수 있다.

마. 도면 및 조감도 자료 등의 제출형식은 발주처 및 관련기관, 후속 용역 수행자 등이 연계 활용하는데 문제가 없도록, 발주처와 미리 협의하여야 한다.

바. 본 용역에 대한 일체의 성과품 전체를 전자메모리장치에 저장하여 납품하여야 하며, 발주처와 협의하여 수록범위와 방법을 결정한다.

6. 보안사항

가. 과업수행에 필요한 사항이 정부, 지자체 및 관계기관의 보안과 관련되는 자료는 해당기관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 본 용역과 관련된 자료 및 기록에 대하여는 발주처의 승인 없이 타인에게 제공·대여할 수 없으며, 자료 외부누설과 보안사항 불이행 등으로 사회적인 물의 또는 민원 발생 시 과업수행자가 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.

다. 과업수행자는 용역 과정에서 수집된 모든 기록, 자료 및 연구결과 등을 시건 장치가 되어있는 별도 보관함에 대외비, 일반자료 보관함으로 구분, 정･부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

라. 과업수행자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 과업수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

마. 과업수행자는 과업내용을 과업진행 이외의 다른 목적에 사용할 수 없으며, 발주기관의 승인 없이 임의로 소유 또는 복사하여 외부에 유출하거나 반출하여 사용할 수 없다.

사. 참여 기술자는 용역내용에 대한 보안책임이 있으며 과업수행 중 보안규정의 준수의무를 지고 발주기관에게 보안각서를 제출하여야 한다.

아. 과업 폐기물은 반드시 모두 소각 또는 파쇄 처리하여야 한다.

자. 부득이한 사정으로 과업참여자가 교체될 시에는 발주기관의 확인을 받아야 하며, 인수인계를 철저히 하여 과업내용의 유출을 방지하도록 하여야 한다.

7. 기타사항

가. 본 과업을 수행함에 있어 관계법령에 의한 행정절차(협의) 이행이 필요한 경우 과업수행자는 용역 완료 후에라도 이를 이행할 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

나. 과업수행자는 성과품 납품 및 용역 완료 후에도 발주처에서 자문을 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 하며, 각종 행정절차 등의 이행이 완료될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

다. 본 과업의 수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 또는 성과품에 대한 저작권 및 특허권으로 인한 사회적 물의를 일으켰을 때에는 과업수행자가 민·형사상의 모든 책임을 져야한다.

라. 타인의 권리 대상으로 되어 있는 특허권 등의 권리를 사용할 때에는 그 비용을 과업수행자가 부담하여야 한다.

마. 본 과업은 용역수행과 관련이 있는 계획과 연계하여 일관성 있는 계획을 수립하여야 하며, 관련 보고서 및 성과품 작성 시 조사시점과 인용 자료에 대한 출처를 명시하여야 한다.

사. 납품된 성과품의 특허권, 지적재산권 또는 판권 등 저작·소유권 및 기타의 권리관계는 발주처에 귀속되며, 발주처는 이를 이용하여 홍보, 출판, 전시 등 일반에 공개하여 사용할 수 있다.

3		과업 세부내역

제1장 과업 일반사항

1. 과업수행의 기본방향

가. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 관련 법규, 조례 등과 발주기관의 별도의 지시사항이나 특기사항이 없는 한 본 과업내용서에서 제시한 내용을 원칙으로 한다. 단, 이의가 있을 경우 계약상대자 임의로 판단할 수 없으며, 발주처와 협의․확인 후 수행한다.

나. 계약상대자는 발주처에서 별도로 제시하는 추정공사비 범위 내에서 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행한다.

다. 계약상대자는 발주처가 예측할 수 없었던 상황이 발생할 경우 즉시 발주처와 협의 후 과업을 수행한다.

라. 국토해양부에서 고시한「건축물의 에너지 절약 설계기준」과「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」등 각종 에너지 절약시설 기준에 부합하는 설계로 에너지 절약형 및 고효율 에너지 기자재를 설치할 수 있도록 설계하여야 한다.

마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

바. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률이 제시하는 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

2. 계약상대자의 업무수행

가. 계약상대자는 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당공사에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등 사업계획을 세워 최상의 설계가 되도록 해야 한다.

나. 계약상대자는 발주처의 승인 없이 과업의 범위․내용 등을 임의로 변경할 수 없고, 발주처가 필요하다고 지시하는 각종 조사자료 수집 및 시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

다. 건축, 기계설비, 전기설비, 정보통신설비, 소방설비 등 공종별로 분리하여 작성하되, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

라. 안전관리 및 품질관리 등에 대하여 해당 규모에 적정한 내용을 시방서에 명기하고 필요한 비용을 내역에 반영한다.

마. 계약상대자는 현지 과업수행을 표시하는 사진 및 과업수행 기록을 유지하고 이를 제출하여야 하며, 계약상대자는 과업수행 중 또는 설계 성과물 제출 후에도 설계내용에 관하여 일체의 보안유지에 책임을 진다.

바. 책임 및 하자

(1) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주처와 협의사항 등을 만족하여야 한다.

(2) 계약상대자는 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약문서 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이한 점을 발견할 경우 즉시 발주처에 통보하고 협의한다.

(3) 계약상대자는 준공 후 설계상의 불완전으로 인해 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 발주처에 피해가 있을 경우, 계약상대자가 필요한 조치를 취하지 않아 발생되는 모든 사항에 대하여 민․형사상 책임을 진다.

사. 설계용역비

(1) 계약체결 후 설계 용역비 산출 시 중대한 하자가 있었음이 발견되었을 경우, 발주처는 계약된 용역비를 감액 조치할 수 있다.

(2) 계획의 조정으로 인해 물량이나 공사비가 경미하게 증가된 경우 계약상대자는 이에 대한 설계용역비 증액을 청구할 수 없다.

(3) 설계용역 과업수행 중 발주처에서 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구하는 경우, 계약상대자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이를 이행한다.

(4) 발주처가 과업내용서의 범위에 포함되지 않은 별도의 추가 과업을 지시할 경우 상호협의에 의해 추가 비용을 지불할 수 있다.

(5) 설계용역비의 선금 및 기성대가는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 관련 예규에 따라 지급한다.

아. 납품 및 검수 : 최종 실시설계도서는 발주처가 충분히 검수할 수 있도록 계약납품 7일 전에 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 수정 또는 변경사항이 있을 경우에는 즉시 조치하여 계약 납품일까지 납품한다.

자. 계약의 해제․해지 또는 일시정지 : 설계용역 계약체결 후 용역수행 중 다음의 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부(일부)를 해제․해지 또는 일시정지 할 수 있다.

(1) 정당한 이유 없이 약정한 기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 않을 경우

(2) 수급인의 귀책으로 인하여 용역수행기한까지 당해 용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우

(3) 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법․부정행위가 있는 경우

(4) 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

(5) 과업지시서(계약체결 후 제시하는 제반 자료 포함)의 내용과 발주처의 정당한 지시를 계약상대자가 고의 또는 임의로 이행하지 않을 경우

(6) 정당한 사유 없이 발주처의 지침에 따르지 않고 계약상대자 단독의 주장으로 발주처와 최종합의가 이루어지지 않음으로써 과업수행에 지장을 초래한다고 판단될 경우

(7) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

(8) 기타 발주처의 필요에 의하여 지시한 경우

차. 설계도서 보완․수정 : 완성된 설계도서 중 제반법규 및 규정에 지적되는 상황이 발생될 시에는 이의 없이 보완․수정하여야 한다.

카. 기타 사항은 별도의 계약조건 및 용역계약 일반조건에 의하며, 여기에 명기되지 아니한 사항은 관계 법률에 의하되 법률에 명기되지 아니한 사항은 발주처의 해석에 따라야 한다.

3. 관련기관 인․허가 및 협조

가. 계약상대자는 본 과업과 관련된 관계기관 인․허가 및 심의사항이 있을 시 이를 설계기간 중 완료하여야 한다.(건축, 소방 등)

나. 계약상대자는 설계도서 납품 전 에너지이용 합리화․중소기업제품 우선구매, 사전규격 심사 등 관련법규에 의한 협의 등이 필요한 경우 이를 반영한 후 납품하고, 이와 관련된 일체의 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 계약상대자는 용역 예정공정표상의 공정이 10%이상 지연될 경우 그 사유 및 대책을 강구하여 문서로 발주처와 협의하여야 한다.

4. 설계 변경

가. 발주처는 다음의 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

(1) 기본계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위 변경 시

(2) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

(3) 계약상대자 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 변경

(4) 기타 설계변경의 필요 시

나. 조정대상

(1) 설계용역 과업내용 중 연면적의 10%이상 증감이 발생한 경우, 계약금액을 기준으로 산정한 단위면적당 금액으로 10%이상 증감 면적에 대해 정산할 수 있다.

(2) (1)항에 해당하지 않는 설계변경(계약내용 변경 등 포함)의 경우 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 및 본건 용역 계약서 상 ｢용역비 산출근거｣, ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 및 대가기준｣ 등에 따라 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

(3) 조정대상 제외

① 법규, 지침위반 등 설계자의 설계 오류에 의한 과업

② 대안수립 등 설계과정상의 조정, 검토를 위한 과업

③ 색채계획, 자재검토서 등 도면이 아닌 보고서 형태로 표현된 용역

④ 인․허가 추진 및 조건 이행을 위한 과업

단, 발주처 사유로 인한 변경은 제외되며 기타사항은 협의 후 결정한다.

5. 각종 제출서류

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 발주처에 착수계(과업수행계획서 포함)를 작성․제출하여 승인을 득하여야 한다.

(1) 착수계 : 용역명, 계약금액, 계약년월일, 착수년월일, 완수년월일

(2) 과업수행계획서 : 설계용역업무 책임기술자(총괄책임자)와 각 전문분야별 책임자를 지정하고 체계적인 업무수행을 위하여 다음 내용이 포함된 용역수행계획서를 제출한다.

- 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 정보통신, 소방 등) 간의 업무와 책임

- 총괄 및 분야별 책임기술자 선임계

• 공인기관(각종 전문협회 등)에서 발행하는 경력증명서 원본

• 재직증명서

• 국가기술자격증 사본

- 단계별 용역수행계획서의 내용(과업내용서 용역범위 참조)

- 참여기술자 조직도 : 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역서 작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문업체 등이 포함된 실질적인 관련주체의 조직도 작성

- 품질관리계획서

- 분야별 참여기술자 보안각서(반드시 참여기술자 본인의 자필서명)

- 설계용역 예정공정표

- 계약금액에 대한 용역비 산출내역서

- 하도급 승인(예정) 신청 등 기타 발주처의 승인이 필요한 사항 – 다만, 하도급 불허

- 기타 설계용역 업무수행에 필요한 사항

나. 계약상대자는 용역 예정공정표상의 완료일 이전에 각종 서류를 작성․제출하여 발주처의 검토․확인 후 결정한다.

(1) 기본설계, 실시설계 검사원

(2) 각종 조사보고서 및 측량성과표

(3) 과업내용서와 관련된 제반법령 및 조례 검토서

(4) 관련기관 협의, 허가 및 각종 인증에 필요한 서류 등

다. 계약상대자는 과업수행계획서의 용역 예정공정표를 기준으로 공정보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

(1) 주간공정보고 : 매주 월요일에 전주 공정 보고

(2) 월간공정보고 : 제출일정 별도협의

(3) 수시보고 : 발주기관 요청 시 설계진행 사항 보고

라. 기타 용역업무 수행에 필요한 사항

(1) 본 과업을 수행함에 있어 발생될 수 있는 문제점 및 해결방안

(2) 업무협의 결과보고서 등

제2장 분야별 설계지침

1. 일반사항

가. 본 과업내용서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한, 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 계약상대자 임의로 판단할 수 없으며, 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신 및 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 본 건물 준공도서 등을 사전에 검토하여 기존 건축물 마감, 급․배수관로 위치, 전기․통신 인입점, 소방시설 현황, 폐자재 운반로 등 현장여건 조사를 철저히 한 후 이를 설계에 반영하여야 한다.

라. 장애인 등에 대한 편의시설 설치 및 건설폐기물 처리 등은 관련법규에 맞게 설계에 반영하여야 하고 에너지절약 및 환경 친화적인 건설공사를 위한 공법, 설계개념을 적용한다.

마. 기능인력 및 자재수급을 고려하여 건식공법을 충분히 검토하여야 하며, 공사에 필요한 시공공법 및 건축자재 등은 국내자원을 최대한으로 활용할 수 있도록 설계한다.

바. 전체 공사비용이 추정공사비 내에서 이루어질 수 있도록 계획하고, 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 기본조사 내용을 반영하여 설계하여야 한다.

사. 설계도서에 설계에 요구되는 성능과 규격, 재질을 구체적으로 명시하여야 한다.

아. 각종 자재마감 및 색채계획 등은 기존 건축물과 어울리게 하여야 하고, 인접한 시설에 직․간접적인 피해가 발생하지 않도록 주변 환경을 철저히 조사․분석하여 공사시행과정에서 예상되는 유․무형의 손실을 최소화 할 수 있도록 설계하여야 한다.

자. 기타 발주기관이 요구하는 사항을 반영한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축

(1) 본 건물의 건축적인 특성을 고려하여 업무시설로서의 기능성과 효율성이 뛰어나도록 설계하여야 한다.

(2) 내부시설물은 다목적, 다기능적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계하여야 하며, 공간계획은 장래 기능 및 수용시설의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 공간의 호환성과 유연성을 최대한 고려하여야 한다.

(3) 본 건물 사전조사를 통하여 경제성과 안전성을 종합적으로 고려하여 합리적으로 설계하여야 한다.

(4) 건축설계는 아래 사항을 기준으로 하되 아래와 관련된 사항을 종합적으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

- 각 동, 층별 구획 및 실내 마감

- 스타트업 지원시설(보육실, 회의실, 오픈스페이스, 각종 센터 등) 발주처에서 지정하는 시설에 대한 실내마감

- 기타 효율적 사무공간 조성을 위한 건축 설계 일체

(5) 건축설계는 주위환경과 조화되고, 사용자에게 밝은 느낌과 친밀감을 줄 수 있도록 설계하여야 하며, 마감재는 친환경적이며, 유지관리가 용이하고, 화재 및 방수에 강한 자재로 설계한다.

(6) 주요 마감재의 결정은 발주기관의 승인을 득하여 설계에 반영토록 하고, 친환경 자재를 적극 검토하여야하며, 유지 관리비가 적게 들고 내구성이 좋으며, 준공 후 대체구매가 용이한 자재를 우선 고려토록 한다.

(7) 국산자재를 우선적으로 검토하여야 하며, 부득이한 경우 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 발주처의 승인을 득한 후 수입재를 설계에 반영할 수 있다.

(8) 기타 전기 및 통신, 설비, 소방 등 설비분야와 건축분야의 설계내용을 종합적으로 검토․협의하여 관련 공종간 시공에 문제가 없도록 최적의 설계를 하여야 한다.

나. 설비분야(기계, 전기, 통신, 소방 등)

(1) 각 분야 설비는 건축물 용도 및 기능을 고려하고, 보안성, 에너지 절감, 경제성, 운영성, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 적합한 설비를 적용한다.

(2) 충분한 자료를 수집하고, 개량된 선진설비 방식과 비교․검토하여 최적안을 설계에 반영토록 한다.

(3) 건축공정과 연관되는 부분을 면밀히 검토하여 설계에 반영하고, 원활한 시공 및 기능을 유지토록 하여야 한다.

(4) 설비공간은 향후 장비교체, 유지관리 space 등을 충분히 고려하여 위치, 면적, 층고 및 장비 반입구를 확보하여야 한다.

(5) 초기투자비, 유지관리비, 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적으로 설계한다.

(6) 각 분야 설비의 설계시 분야별로 최적의 설비를 설계하되 기존 본건물 설비와의 연계성을 검토하여 설계하여야 한다.

(7) 기계설비 계획시 아래 사항을 검토한다.

- 본 건물 자동제어시스템 등 기계설비에 대한 사전 검토 후 이를 설계시에 반영

- 급․배수 필요시설(탕비실, 휴게실 등)에 대한 급배수 시설 설치 계획(냉․온수)

- 특수시설에 대한 공조설비 계획(개별 공조 또는 토출구 조정 등)

- 급배수 시설에 대한 급수량 산정, 급수대상인원 산정, 급탕방식의 결정, 배수방식, 통기방식 등 기초계산 및 각 방식 선정의 적정여부 검토

- 급수 조닝 및 관말 수압, 용량 및 부속품 취부의 적정여부 검토 등

(8) 전기설비 계획시 아래사항을 검토한다.

- 본 건물 전기인입 및 배관, 배선설비에 대한 사전 검토

- 실 별 구획 등에 따른 전기 배관․배선 등 전력간선 설비의 경로배선 포설방식 및 사용 전선류의 허용전류 및 전압 강하계산에 의한 선정규격, 접지선, 조명방식․기구 등을 결정

- 조명 및 각 실별, 개인사용자를 위한 전등, 전열설비의 구성 및 배치

- 기계, 통신 등 설비부하 및 기타 전원설비 내용을 충분히 숙지하여 전원설비 일체를 고려한 전기설비 계획 검토

(9) 통신설비 계획 시 아래 사항을 검토한다.

- 본 건물 정보통신시스템에 대한 사전 검토

- 업무공간 내 통신회선수 및 케이블 규격 등 내선 구성 및 자재선정

- 각 실별 면적 및 용도에 맞게 필요시 벽부형 또는 바닥형 수구설치

- 전력선과 법적 이격거리 준수 등

- 본 건물 통신설비(음성 및 데이터 등)의 말단에서부터 개인사용자 좌석 또는 특수시설 내부의 내선 연결 계획

- 내부 출입통제시스템 및 CCTV 설치 계획 및 건물통합방재센터와의 연결 계획(공동모니터링이 가능해야 함)

- 발주처 지정 특수시설(회의실, 교육실 등)에 대한 AV시스템 및 전관방송 설계

- 기타 과업범위 내 정보통신시스템 설치와 관련한 일체의 사항 검토 및 타 공종과의 연계성을 고려한 설계

(10) 소방설비 계획 시 아래 사항을 검토한다.

- 본 건물의 소방설비시스템에 대한 사전검토 후 기존설비와의 연계성을 검토하여 설계에 반영

- 건축 설계에 따른 감지기 및 스프링클러 등 소방시설의 설치계획 등

- 감지기 및 스프링클러 등 소방방재시설의 종류 및 수량은 관련법규에 따라 용도와 면적에 맞게 설계

- 용도 및 장소별 피난 유도등과 통로 유도등 설치(필요시)

- 기타 건축 공사에 따른 소방․방재설비 관련 사항에 대한 전반적인 검토 등

(11) 기타

- 일체의 설비분야 설계는 본 설계용역의 취지 및 목적에 부합하도록 전반적으로 검토하여야 하며 모든 설비에 대한 계획은 본 건물 기존설비와의 연계성을 고려하여 최적의 방안으로 구성되어야 한다.

- 기타 기계, 전기, 통신, 소방 등 최적의 설비구성을 위해 본 과업내용서의 범위내에서 발주처에서 요구하는 사항을 설계에 반영하여야 한다.

제3장 설계도서의 작성 및 납품

1. 기본사항

가. 설계도서는 필요시 공종별로 분리발주가 가능토록 건축, 전기, 통신, 소방 등으로 구분하여 작성하되 기타분야는 건축분야에 포함한다. 다만 분리가 곤란하거나 분리의 필요성이 없다고 인정되는 경우 발주기관과 협의하여 이를 변경 할 수 있다.

나. 상기도서 제작 중 중복이 있을 때는 단일화할 수 있으며 동일도면에 복합할 수 있다.

다. 본 공사에 소요될 주요 자재 중 관급으로 조달 구입하여야 할 주요자재는 조달관련법령 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원법령 등 관련 법률을 사전 검토하여 발주기관과 사전 협의․결정하여야 한다.

라. 건설기계, 인력, 자재 등의 관리계획에 의하여 공사예정공정표를 작성하여야 한다.

마. 용역 완료 후 용역(최종)보고서를 용역결과물로 제출하여야 한다.

2. 기본설계 도서의 작성

가. 기본설계 제출도서 주요목록

제출도서 목록	규격	수량	비고
보고용 판넬 및 PPT 파일	A2	각 1식	건축개요, 전층 사무실 배치도
기본설계보고서	A3	2	분야별 건축계획서, 법규체크리스트 개략공사비 내역서 등
기본설계도면	A3	2	각 분야별 도면(심의용 도면 포함-필요시)
마감 및 색채계획서	-	2	주요시설(바닥,벽,천정) 마감재 사양 및 색상표(색상번호 기재), 색상대비표 등

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 중급 범위 내에서 명시된 도서를 모두 제출하여야 함

나. 기본설계 도서의 작성

(1) 계약상대자는 발주처로부터 제공된 자료와 조사 및 자료수집 내용을 근거로 인테리어 공사의 규모, 예산액, 기능성, 효율성, 미관적 측면에서 설계목표를 정한 후 기본설계에 착수하여야 한다.

(2) 계약상대자는 기본설계 진행 전에 디자인 개념의 설정, 발주처의 요구조건 등을 사전에 협의한 후 이를 기본설계(안)에 반영하여야 한다.

(3) 계약상대자가 제출한 안이 부적합하다고 발주처에서 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 안을 재작성하여야 하며 그로 인한 용역비의 추가 및 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

(4) 발주처가 보완조건으로 설계(안)을 승인하면 계약상대자는 즉시 보완․제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 실시설계를 진행한다.

(5) 계약상대자는 기본설계 완료시 상기 가.항의 기본설계도서를 제출하여야 한다.

(6) 현장조사보고서 : 용역대상지의 현장답사를 통한 건물 현황 파악 및 기존 설비(건축 및 전기, 통신, 기계, 소방 등)의 체계 파악

(7) 기본설계보고서 : 분야별 설계개요 및 설계의도 설명, 전기․설비․통신 등 계통도 및 기본설계 단계에서 필요 및 결정사항을 모두 수록

(8) 법규 체크리스트 : 적용이 예상되는 제반법규 및 단계별 법적절차의 검토(필요시)

(9) 개략공사비 내역서 : 기본설계도서를 바탕으로 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 의한 공사원가계산의 방법으로 분야별․공종별 개략공사비를 산정한다.

(10) 기본설계도면 : 기본설계의 원칙 및 기준에 따라 필요한 분야별 도면

(11) 마감 및 색채계획서 : 발주처 지정 주요시설에 대한 마감재 및 색채계획 제출(필요시 복수안 제출 가능)

3. 실시설계 도서의 작성

가. 실시설계 제출도서 주요목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종				비 고
					건축 (기계포함)	전기	통신	소방
1	용역(최종)보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	각 공종 취합 1부로 작성
2	설계도면(편철)	A3	3	부	◯	◯	◯	◯
	설계도면(반책)	A3	3	부	◯	◯	◯	◯
3	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	필요시
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가표	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
9	일반시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
10	특기시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
11	주요자재사양서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯
12	실내투시도	A2	3	컷	◯				주요시설 (발주처 요청시)
13	인․허가 및 심의 관련 서류		1	식					필요시
14	공사예정공정표		3	부					전공종 포함
15	CD-ROM		2	SET	◯	◯	◯	◯	모든 도서내용 포함
16	기타 발주기관 요구사항		1	식	◯	◯	◯	◯	보고용설명서, PPT결과물 등

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 중급 범위 내에서 명시된 도서를 모두 제출하여야 함

※ 내역서 : 내역 프로그램 결과물, 엑셀 호환변환파일 모두 제출

나. 용역(최종)보고서의 작성

(1) 설계자는 최종 용역보고서를 제출하여야 하며, 보고서에는 설계에 참여한 참여기술자 명단 및 그의 업무수행 사항 등을 기록하여 제출하여야 한다.

(2) 용역(최종)보고서의 수록 내용은 아래와 같다.

ㅇ 주요시설 투시도(발주처가 요청하는 경우)

ㅇ 각 분야별 설계설명서(설계개념 및 계통도 등)

ㅇ 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 기계설비 및 전기․통신 관련 시스템 등, 각종 자재의 선정사유 및 사용계획서, 시설물유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격(좌철)으로 제출(설계자 의도 포함 : 인테리어의 경우 입면 등 디자인 요소에 대한 개념 표현)

다. 실시설계도면의 작성

(1) 기 설계되어 있는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주처의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품한다.

(2) 도면작성에 있어 각 실의 명칭과 면적, 실 번호를 해당 실에 직접 기입하여야 하며 번호 및 부호등을 사용하여서는 안 된다. 다만 해당 실이 축척상 협소하여 기재가 곤란할 경우 예외로 한다.

(3) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장기술자들이 쉽게 이행하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

(4) 단위는 미터법으로 표기(mm)하고, 숫자는 아라비아 숫자로 표기한다.

(5) 문자는 한글 사용을 원칙으로 하며, 한글로 표기가 곤란한 경우 영문, 한자 등으로 병기 가능하다.

(6) 약자는 영문에 한해서 통상적으로 사용되는 범위내에서 사용하되, 반드시 약자 해설집을 목록란에 명기하여야 한다.

(7) 설계도면의 축척은 설계도서 작성기준에 따른다.

라. 설계내역서의 작성

(1) 설계내역서의 작성은 ‘중소기업 직접구매 대상품목 지정내역 고시’ (중소기업청고시, 작성일 현재 시행기준)에 따른 품목을 분류하여 작성하여야 한다.

(2) 내역서의 작성은 일반공사 시방서 순서 및 공사 작업 순서대로 작성한다.

(3) 수량의 산출은 설계변경시 물량증감이 용이하도록 공종별, 층별, 부위별로 산출하고 계산식을 분명히 하여야 한다.

(4) 일위대가 적용은 정부 일위대가표에 준하여 작성하되 내역서에 첨부하여 철한다.

(5) 국내 재료의 단가는 다음에 열거한 방법에 의거 결정 한다.

ㅇ 국토교통부발행 실적공사비, 일위대가

ㅇ 조달청발행 정부구매물가 가격정보(나라장터)

ㅇ 대한건설협회 발행(월간) 거래가격 - 시중 노임단가 적용

ㅇ 사단법인 한국물가협회발행(월간) 물가자료

ㅇ 사단법인 한국물가정보 발행 종합물가 정보지

(6) 위 물가시세표 등에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 견적서(2개 업체 이상)에 의하되 원가 견적서를 첨부하여야 하며 필요시 원가조사기관에 조회하여 결정할 수 있다.

(7) 운반공사에 사용되는 장비, 운반지(사토장 등), 운반거리, 도로상태 등을 조사하여 내역서, 공사 시방서에 명확히 표기하여야 한다.

마. 시방서의 작성

(1) 표준시방서를 기준으로 설계 내용에 부합되도록 공사 시방서를 작성하며, 표준 시방에 없는 공종인 경우 별도 전문시방서를 작성한다.

(2) 신공법 적용시에는 공법에 대한 설명과 이에 따른 관계자료 등 검토보고서를 제출하고 담당 감독관과 협의하여야 하며 협의 후 관계자료를 첨부한다.

(3) 제출양식은 A4 좌철제본으로 하고, 표지에 수행 용역명, 일자 및 30㎜×30㎜(가로×세로)의 정사각형을 표지 좌측 상단에 표기 후 관리번호를 부여한다. 또한 식별이 용이하도록 제본되는 마구리면에 용역명 및 설계도서명, 공종을 구분하여 명기한다.(특기시방서, 내역서 표지 양식 공통)

바. 보고용 설명서의 작성

(1) 수록내용 : 설계개요, 주요시설 투시도, 도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등)

(2) 제출양식 : A2 size(반접)의 5㎜ 폼보드를 사용 및 PPT(파워포인트)

4		제안 일반사항

1. 적용규정

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동시행령 및 시행규칙

□ 행정안전부 예규 제116호 ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준’

2. 제안 일반 사항

□ 배정예산 : 금168,000,000원(금일억육천팔백만원),부가가치세 포함

□ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 2021. 4. 16.(금)

3. 계약방법 : 제한경쟁 입찰, 협상에 의한 계약, 총액계약

4. 입찰참가자격(다음 각 항의 자격을 모두 갖춘 사업자)

가. ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 않으며, 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 사업자

나. ①건축사법 제7조에 의한 건축사 자격을 취득하고 동법 제23조에 의한 건축사 사무소 개설신고하고, ②전력기술관리법 제 14조에 따라 종합설계업 또는 전문설계업(1종)을 등록하고, ③소방시설공사업법 제4조에 의한 전문 또는 일반 소방시설설계업(전기 및 기계)을 등록한 자

다. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의 2(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항에 따른 중소기업 확인서를 소지한 사업자(제출마감일 전일까지 발급된 것으로 증명서를 제출하여야 참가 가능)

5. 단독이행 및 공동이행 방식(분담이행 방식)

- “건축사사무소”를 대표사로 하는 공동수급(분담이행)이 가능하며, 공동수급체 구성은 대표사를 포함하여 3개사 이내로 제한하며 계약참여 최소지분율은 10% 이상이어야 함

- 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없음

- 공동수급협정서는 반드시 제안서 접수 마감일 전일까지 전자문서로 접수를 마감해야 함

6. 입찰참가신청 및 제안서 제출

가. 입찰공고

□ 공고기간 : 2020. 12. 04.(금) ~ 2020. 12. 15.(화)

□ 공고장소 : 조달청 나라장터, 발주기관 홈페이지 등

나. 제안서 양식 배부

□ 방    법 : 제안요청서 내 제안서 양식 참조

다. 입찰(제안서)서류(제출서류목록 참고) 및 제출방법

구분	내용
① 가격제안서 (전자입찰)	• 전자제출 : 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)에 총액 제출(비예가) • 전자제출 접수기간 : 2020. 12. 07.(월) 10:00 ~ 12. 15.(화) 16:00 ※ 가격 총액제출 시 반드시 부가세 포함한 금액으로 제출하여야 하고, 최종낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함 ※ 제안서 및 제안사설명서를 미제출한 경우 가격개찰 전 사전 판정에서 제외 ※ 세부산출내역서(별도서식 안내) 협상진행 시 제출
② 기술제안서 (방문제출)	• 직접방문 제출 : 충남정보문화산업진흥원 충남콘텐츠기업지원센터 - 충남 아산시 배방읍 희망로 46번길 45-11 2층 - 접수 담당자 : 경영기획실 강의수 선임(041-620-6404) • 접수일시 : 2020. 12. 14.(월) 10:00 ~ 12. 15.(화) 16:00 까지(시간엄수) • 제출서류 ① 제안서 8부(평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지) ② 문서파일(발표평가시 사용하는 PT자료 및 제안서 파일, 이후 변경 불가) ③ 제안사 설명서 1부 ※ 제안요청서를 숙지‧준수하여야 하며, 이를 따르지 아니하여 발생하는 불이익에 대한 책임은 입찰참가자(제안사)에 있음 ※ 제안사 소속직원이 직접 방문 제출 하여야 함

o. 가격제안서는 전자제출만 가능하며, 가격제안서를 전자제출하지 않고 기술제안서류를 제출한 경우 협상적격자에서 제외 함

라. 제안서의 효력

□ 제출된 제안서의 내용은 (재)충남정보문화산업진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 낙찰자로 선정 시 계약 조건의 일부로 간주

□ (재)충남정보문화산업진흥원은 필요시 제안사에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

마. 제안서 관련 유의사항

□ 제안서는 지침에 따라 누락 없이 정확하게 작성하여야 함

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 함

□ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

□ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 제반비용은 제안사의 부담으로 함

바. 입찰 보증금

□ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제37조 및 제38조와 같은 법 시행규칙 제41조의 규정에 의함

7. 제안서 및 발표(프레젠테이션) 평가

가. 평가점수 산정방식

구분			배점
기술능력평가	정량적 평가	15점	90점
	정성적 평가	75점
가격평가	제안가격평가	10점	10점
총계			100점

□ 기술능력평가

▪ 평가위원은 7인 이상 10인 이내의 위원으로 구성

▪ 평가방법 : 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 평균하여 획득점수를 산출(최고점수 또는 최저점수가 1개 이상일 경우 1개만 적용)

▪ 기술평가점수는 90점 만점으로 하고 각 평가항목은 다음과 같음

구 분		평가항목	평가요소	배점 한도	비고
기술능력 평 가	정량적 평가분야	관련 수행실적	- 최근 5년간 유사용역 수행 실적	5
		경영상태	- 기업신용평가등급	5
		조직관리	- 인력보유현황(사업참여 인력)	5
		소 계		15
	정성적 평가분야	과업 이해도	- 수행과업의 이해도	10
		기획력 전문성 차별성	- 과제1) 효과적인 동선계획 제시	15
			- 과제2) 그린-디지털 혁신 공간 방안 제시	20
			- 과제3) 체계적인 보육·근로 공간 구성 및 활용방안 제시	15
		구현성	- 제안의 실현가능성 (계획성)	10
		수행의지	- 추진의지의 적극성 등	5
		소 계		75
기술평가점수 합계				90
가격평가점수(제안가격 평가)				10
총 계				100

▪ 정량적 평가분야(15점) 세부 배점 및 심사기준

구분

평가항목

배점

평가기준

비고

정량적

평  가

(15점)

관련

수행실적

(최근 5년간)

5

○ 최근 5년간 설계용역 단일 실적금액 또는 연면적(실적범위)

실적금액 기준	실적범위(연면적)
• 1억 8천만원 이상 (5점) • 1억 5천만원 이상 ~ 1억 8천만원 미만(4점) • 1억 2천만원 이상 ~ 1억 5천만원 미만 (3점) • 9천만원 이상 ~ 1억 2천만원 미만 (2점)	• 3,500㎡ 이상 (5점) • 3,000㎡ 이상 ~ 3,500㎡ 미만(4점) • 2,500㎡ 이상 ~ 3,000㎡ 미만(3점) • 2,000㎡ 이상 ~ 2,500㎡ 미만(2점)

※ 공고일 기준 최근 5년간 관련분야 실적

※ 실적증빙서류를 제출하여야 인정함 (실적 범위(연면적)가 명시되어 있어야하며, 2개 분야 중 제안자에게 유리한 1개 분야만 평가

※ 공동계약의 경우, 대표사 (건축사사무소)를 대상으로 평가

※ 인정 실적 미 보유 시 '0'점

경영상태

5

○ 신용평가(신용평가등급이나 기업신용평가등급 평가)

○ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고 마감일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가

※ 세부평가표 ‘주1)신용평가기준’ 참고

※ 유효기간 내에 있는 신용평가등급 서류를 제출하여야 인정함

※ 유효기간 경과자료 제출 및 자료 미제출 시 '0'점

※ 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

인력현황

5

○ 전문 인력 참여현황(5점)

• 7명 이상(5점)   • 4명 이상 ~ 7명 미만(4점)

• 4명 미만(3점)

※ 전문 인력인정 : 4대 사회보험 사업장 가입자 명부를 제출하고, 명부에 포함되어 있어야 하며, 관련 분야 3년 이상 경력 증빙서류를 제출하여야 인정함

※ 자료 미제출 시 '0'점

※ 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

주1) 신용평가 기준	① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가 등급	평점 (점)
	AAA		①의 AAA에 준하는 등급	5
	AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	5
	A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	5
	BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	4
	BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	4
	BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	4
	B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	4
	CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	3

□ 가격평가(기술제안서 평가 완료 후 개찰 및 평가진행)

▪ 주관기관은 사업의 예산규모 내에서 관련 법령 및 관계규정에 따라 제안서 접수 이전에 추정가격 결정

▪ 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수 산출

※ 가격 전자제출은 반드시 부가세 포함한 금액으로 기재(낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함)

나. 기술제안서(발표) 평가(※평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지)

□ 평가 일정 : 2020. 12. 18.(금) (예정)

- 발표순서는 접수번호 순으로 진행

- 발표자는 대표 제안사의 사업관리자(PM)이어야 함

- 발표 시 발표자 포함 3인 이내로 참석자 수를 제한함

※ 자세한 시간 및 장소는 접수완료 후 반드시 문의하여 확인요망

□ 발표 자료는 파워포인트로 작성(15분 이내, 30쪽 이내)

※ 기술제안서 접수 시 CD 또는 USB(파일)로 제출 ⇨ 이후 변경 및 수정 불가

□ 발표시간은 제안사별 30분(발표시간 15분, 질의응답 15분)

※ 발표 시 평가의 공정성을 위해 회사명 언급 금지

다. 협상대상자 선정 및 협상절차

□ 제안서 평가는 기술능력과 가격에 대한 종합평가를 실시하며, 종합평가 점수는 100점 만점으로 기술능력 90점, 입찰가격 10점으로 함

□ 제안서 평가결과 기술능력평가 점수 배점한도의 70점 이상인 제안사를 협상적격자로 선정 후 종합평가 점수가 높은 협상대상자부터 기술 및 가격 협상을 진행 함

□ 가격제안서의 입찰가격이 기초금액(부가세포함)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외 함

□ 우선순위 협상대상자와 협상진행이 완료되면 차순위 협상대상자와 협상은 진행하지 않음

□ 모든 제안사가 기술능력평가 점수 배점한도의 70점 미만 이거나, 협상대상자와 협상이 모두 결렬될 경우 재공고입찰이나 새로운 입찰을 진행 함

□ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 제안서 내용 일부를 조정할 수 있음

8. 입찰의 무효

□ 제안서의 내용이 사실과 다른 경우

□ 입찰참여 자격이 없는 자가 제안서를 제출한 경우

□ 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우

□ 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

9. 부적당업자 입찰 참가자격 제한

□ 입찰자가 ‘지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률’ 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)의 규정에 해당하는 경우에는 입찰참가자격을 제한할 수 있음

10. 비밀유지의 의무

□ 입찰자는 우리 원으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

11. 관계 규정․법령 등의 숙지

□ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 공고문 및 제안요청서, ‘지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률’과 관련 예규 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하여 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

12. 계약 체결관련 유의사항

□ 15일 이내에 협상이 성립된 낙찰자는, 협상완료일로 부터 10일 이내에 소정의 서식에 의한 계약서 및 관련서류를 구비하여 계약을 체결하여야 함

□ 낙찰자는 계약체결 시 세부 사업수행계획서(세부 추진계획, 세부추진 일정표, 추진체계도 등)를 제출하여야 하며, 일정단위로 사업추진 실적을 정기적으로 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약체결시 ‘인지세법’에 의한 정부수입인지를 제출하고, 이행보증보험(계약보증금: 계약금액의 15%)을 제출하여야 함. 또한 대금청구 시 마다 ‘충남도 지역개발기금 설치 조례’에 따라 충청남도 지역개발공채를(청구금액의 2.5%) 매입하고, 국세 및 지방세 완납증명서를 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 계약불이행시 부정당업자로 입찰참가 자격제한을 받게 됨

□ 필요한 경우 대금 청구 시 사후정산(보험료 사후정산 포함)을 요구할 수 있음

□ 과제 수행 완료 후 사업자의 과업 수행결과가 불량한 경우 향후 진흥원 사업 참여에 제한 받을 수 있음

13. 문의

□ 기술제안 및 접수관련 : 스타트업파크TF팀 양정민 선임(041-415-0094)

□ 입찰 및 계약 관련 : 경영기획실 강의수 선임(041-620-6404)

5		제안서 및 제안사 설명서 작성방법

1. 제안서 작성 방법(8부) (※평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지)

가. 제안서 작성지침(필히 준수요망)

- 제안서 및 제안사 설명서 작성은 좌측 접착으로 책제본 또는 링제본(필수)

* 용지는 A4용지를 기준으로 작성

- 본 제안요청서에 명기된 목차에 의해 작성할 것

- 제안서는 제안사의 편의에 맞는 워드프로세스 사용

- 제안서 사본 작성 시 제안사임을 식별할 수 있는 업체명 등의 내용이제안서 표지 및 내용 등에 표기될 수 없음(로고 및 회사명 사용금지)

- 제안서의 구성은 다음에 명시된 제안서 구성에 따라 각각 세분해서
누락이 없이 작성하고 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지를 사용하여 작성

- 제안 내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용시 참고문헌 인용 부분을
명시하며, 제안요청기관에서 요청시 이를 제출

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

- 제출된 제안서의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음

※ ‘기술제안서(총8부)’와 제안하는 회사소개인 ‘제안사설명서(총1부)’를 구분하여 각각 직접 방문 제출하여 주시기 바랍니다.

※ ‘가격제안서’는 전자제출(입찰)로 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)를 통해 총액 제출(비예가) 후 협상대상자 선정 시 세부산출내역서(별도서식 안내)를 최종 제출하여야 합니다.

※  제안서 및 제안서 설명서 작성지침 (책제본, 업체명 표기, 참여인력 이름 전부 표기 등) 미준수 시, 접수처리 불가 또는 감점이 있을 수 있습니다.

나. 제안서 표지(필히 백색표지 사용) / 8부 제출(로고 및 회사명 사용금지)

	충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역 - 기술제안서 -
	제안사 로고 및 회사명 사용 금지

다. 제안서 목차(안) 및 작성요령

□  제안서 목차  참고

항 목	기재사항
Ⅰ. 제안개요
1. 제안개요	- 조성 컨셉 및 과업의 범위와 내용 정의
Ⅱ. 수행계획
1. 기획구성안	- 효과적인 동선 계획 - 그린-디지털 혁신 공간 방안 - 체계적인 보육․근로 공간구성 및 활용방안 ※ 자세한 사항은 34p 2)과제에 대한 기술제안 참조
2. 추진일정	- 단계별 작업계획 및 작업방법 - 과업수행일정표
3. 수행조직/참여인력	- 제안사 조직 및 인원현황 - 사업 수행조직 및 업무문장
4. 관리계획	- 과업 수행체계 - 기타 설계용역 관리에 필요한 사항
Ⅲ. 기타사항
1. 사후관리계획	- 사후관리 체계에 필요한 사항
2. 추가지원내용	- 제안사의 제안사항 기술

※ 유의사항

- 제안서는 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시

- 제안서 목차는 추가할 수 있음

- 제안서는 30쪽 이내로 작성 (표지, 목차, 디자인 콘셉트 등 포함)

- 제안서는 로고 및 회사명 사용 금지

□ 작성요령

1) 업무에 대한 이해도

- 사업의 개요 등을 검토하여 과업의 성격을 명기하고, 과업의 범위와 내용을 정의한다.

- 과업을 수행하는데 있어서 관련계획 및 법령 등의 적용방안, 설계방향에서주요한 고려사항을 명기한다.

- 사업계획, 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 개선방안을 제시한다.

2) 과제에 대한 기술제안

가) 과제 1 : 효과적인 동선 계획

- 그린 스타트업 타운 조성 위치를 고려하여 지하철, 버스승강장 등 기존 인프라를 활용하여 입주기업뿐만 아니라 일반시민의 참여를 유도할 수 있는 마스터 플랜 차원의 효과적인 동선 계획

나) 과제 2 : 그린-디지털 혁신 공간 방안 제시

- 본 사업의 컨셉에 맞는 스타트업, 국내‧외 VC/AC, 빅데이터 열람, 비즈니스 라운지, 휴게실 등 ‘일 + 문화 + 여가’를 한 공간에서 효율‧효과적으로 즐길 수 있는 그린-디지털 혁신공간으로 방안 제시

다) 과제 3 : 체계적인 보육·근로 공간구성 및 활용 방안 제시

- 스타트업의 특성을 고려하여 개방형, 독립형 공간을 조성하여 기업의 규모, 성장단계 등에 따라 안정적인 입주공간 배정이 가능하도록 공간 구성 및 운영공간과 지원공간의 공간 구조를 체계적으로 활용 할 수 있는 방안 제시

3) 수행계획

- 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할한 후, 단계별 작업계획 및 작업 방법을 제시한다.

- 단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함한다.

- 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역 수행팀의 구성방식을 제시한다.

4) 일반사항

1) 심사 평가항목 중 ‘수행계획 및 방법’에서 항공사진, 조감도, 투시도, 모형사진, 일러스트 편집, 고급용지 사용 및 바탕면·여백부 등의 치장은 금한다.

2) 단, ‘수행계획 및 방법’에서 ‘과제에 대한 제안’ 항목( ‘업무에 대한 이해도’와 ‘수행계획’ 항목 제외)은 문장과 다이어그램, 유사사례 사진으로 표현하는 것을 원칙으로 하되, 설계공모 참여자는 제안 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획, 입면계획, 단면계획을 제안할 수 있다. 단, 다음의 기준에 따라 작성해야 한다.

① 가구, 재료의 질감 등 건축물의 장식 표현 금지, 창과 문은 단선으로 개구부  형태만 표시하고 그 외 상세한 표현 금지

② 유사사례 사진을 제외한 3차원 이미지(3D 모델링, 3D다이어그램 등)는 불가

3) 과제에 대한 제안 등 기타 제안서에 제출업체의 설계실적을 활용한 표현 불가

4) 제안서 작성지침 기준을 위반한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리하거나   심사대상에서 제외할 수 있다.

2. 제안사 설명서 작성방법(원본 1부 제출)

가. 표지(필히 백색표지 사용)

	충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역 - 제안사 설명서 -

나. 제안사 설명서 목차

목      차

○ 첨부서류

1. 입찰참가신청서 1부(별지 제1호 서식)

2. 회사 일반현황 및 연혁(별지 제2호 서식)

3. 신용평가 등급확인서 1부(원본대조필) 포함

4. 관련분야 실적(5년간/별지 제3호 서식)

- 계약이행실적증명서(별지 제4호 서식)

5. 참여인력 이력사항(별지 제5호 서식), 4대 사회보험 사업장 가입자 명부 1부

- 대표자 및 참여인력의 개인정보 수집・이용・제공 동의서 1부(별지 제6호 서식) 포함

6. 확약서 1부(별지 제7호 서식), 청렴계약이행서약서 1부(별지 제8호 서식)

7. 입찰보증금 지급확약서 1부(별지 제9호 서식)

8. 사업자등록증 사본 1부, 중소기업확인서 1부
입찰참가자격에서 요구하는 각종 자격증명서 1부

9. 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 1부

- 개인사업자의 경우 대표 개인인감증명서 1부

10. 합의각서 및  공동수급표준협정서 각 1부(별지 제10, 11호 서식)

11. 위임장(대리인 등록시) 1부(별지 제12호 서식)

※ 유의사항

- 서류작성 시 신청인 란에는 필히 대표자명을 기재(회사명 기재 불가)

3. 제출서류 목록

구분		부수	대표사	공동수급구성원
① 제안서	기술제안서	8부	○
② 제안사 설명서	입찰참가신청서-(별지1호)	1부 (원본)	○
	회사 일반현황 및 연혁-(별지2호)		○	○
	신용평가등급확인서(원본대조필)		○	○
	관련분야 실적(최근 5년간)-(별지3호) (계약이행실적증명서 포함-별지4호)		○	○
	참여인력 이력사항 각 1부-(별지5호) (4대 사회보험 사업장 가입자 명부 1부 포함) (개인정보 수집이용제공 동의서 1부 포함-별지6호)		○	○
	확약서-(별지7호), 청렴계약이행서약서-(별지8호)		○	○
	입찰보증금 지급확약서-(별지9호)		○
	사업자등록증 사본 1부 중소기업확인서 사본 1부 입찰참가자격에서 요구하는 각종 자격증명서 1부		○	○
	법인(개인)인감증명서, 법인등기부등본 각 1부		○	○
	합의각서 및 공동수급표준협정서 각 1부(별지10, 11호)		○	○
	위임장(대리인 등록시)-(별지12호)		○
③ CD 또는 USB	PT자료(발표평가시 사용, 제출 이후 변경 불가) 및 제안서 파일	1장	○

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정을 무효로 함.

별지 1	제출서류 양식

(별지 제1호 서식)

입찰참가신청서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 모두 기재하시기 바랍니다.							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	. 보증금률 : 입찰금액의 5% . 보증금납부방법 : 지급확약서 제출
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	. 사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 3항에 의하여 . 본인은 낙찰후 계약 미체결시 귀 진흥원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
			(원인감)			(사용인감)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 원의 제한경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 원에서 정한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 2020년 월 일 신청인 : 대표자명 기재 (원인감) (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제2호 서식)

회사 일반현황 및 연혁

1. 기본사항

회 사 명		대표자명
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
자 본 금		매출액 (2019년)
종업원수	명(상근 / 비상근 )

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

(별지 제3호 서식)

관련분야 실적(5년간)

사업명	사 업 수행기간	계약금액 (천원)	발주처	발주처 전화번호	담당자
계

- 입찰공고일 기준으로 완성(준공)된 이행실적을 기재하며, 하도급 용역은 제외함.

- 실적은 용역이행실적증명서 혹은 관련협회발급서류를 제출하여야 인정함.

(미제출 시 불인정)

- 민간실적의 경우 계약서, 과업지시서, 세금계산서 포함 추가 증빙자료를 제출하여야 인정함.(미제출 시 불인정)

(별지 제4호 서식)

계약 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전 화 번 호
	법인등록번호			사업자번호
	증명서 용도	입찰참가용		제 출 처			(재)충남정보문화산업진흥원
	계약범위·기준 (면적·금액 등)
계약이행실적내용	계 약 명
	계약개요
	계 약 번 호	계 약 연월일	계약기간 (이행기간)	계약금액 (계약면적)		이행실적(금액)			비 고
						비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2020년 월 일
	기관명 : (직인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 : (인)
주) ① 계약이행실적은 입찰공고시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함. ② 이행실적란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 발급 받아야 하며, 기관 직인 및 담당자 (인)이 없는 것은 절대 인정하지 않음. ③ 민간거래 실적은 실적증명서 및 계약서, 세금계산서 포함 추가 증빙자료를 첨부하여야 인정함.

(별지 제5호 서식)

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 위			생년월일
최종학력		학교명		졸업년도	전 공
				년 월
자격증 종류				취 득 일	발급기관		기 타
				년 월
				년 월
기술자등급					제안사 근속년수		년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
해당분야 업무경력		년 월 ～ 년 월( 년 개월)
본 용 역 담당업무

해당분야 경력
사 업 명	참여기간 (년월-년월)	담당업무	발주처	비고

- 4대 사회보험 가입자 명부를 제출하고, 명부에 포함되어 있어야하며,

- 관련분야 3년 이상 경력증빙서류를 제출하여야 인정함.(미제출 시 불인정)

- 증빙서류 제출 시 주민등록번호는 모두삭제 후 제출.

(별지 제6호 서식)

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속	직위/직급	생년월일	성명	동의여부	서명
	대표			□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
본인은 충남정보문화산업진흥원(이하‘진흥원’)의 “충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역” 의 입찰 참여 관련하여, 아래와 같이 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 계약 입찰 참여에 따른 입찰서류(입찰관련 제출서류) 사실 확인을 위한 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목(입찰공고문에서 요구하는 해당정보) - 수행사 대표자의 성명, 주민번호, 직장주소, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 참여인력(내부 및 외부)의 성명, 소속/직책, 생년월일, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 입찰참가 신청서 제출자의 성명, 직위, 생년월일, 주소, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 진흥원 입찰서류 관리를 위한 보유기간까지(최대 5년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 단, 거부 시 계약체결 대상에서 제외 2020년 월 일 (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제7호 서식)

확     약     서

○ 입찰건명 : 충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역

본 제안사는 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 (재)충남정보문화산업진흥원의 방침에 이의가 없음을 확약하며 어떠한 법적 이의를 제기하지 않겠습니다, 그리고 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

2020년   월   일

제안사명 :

대 표 자 :                (인)

(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제8호 서식)

청렴계약 이행 서약서

우리 회사는 부패 없는 투명한 경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 충남정보문화산업진흥원에서 시행하는 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서  입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정위원회에 발주 관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 충남정보문화산업진흥원에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시, 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 충남정보문화산업진흥원의 조치와 관련하여 당사가 충남정보문화산업진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020년  월  일

서약자     업 체 명 :

대표자명 :               (인)

(별지 제9호 서식)

입찰보증금 지급확약서

○ 입찰건명 :  충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역

○ 입찰보증금 : 입찰금액의 5%

본 제안사는 입찰함에 있어 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제37조 제3항에 의하여 입찰보증금을 면제하되, 동법 제12조 제3항 및 동법 시행령 제38조 제1항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생할 시에는 위 입찰보증금을 지체없이 현금으로 납부할 것을 확약하며 각서를 제출합니다.

2020년   월   일

제안사명(대표사) :

대 표 자 :                (인)

(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제10호 서식) - 공동수급의 경우만 해당

합 의 각 서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2020년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2020년      월      일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

사업자등록번호

대 표 자  성 명                       (인)

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

사업자등록번호

대 표 자  성 명                       (인)

생  년   월  일

(별지 제11호 서식) - 공동수급의 경우만 해당 (분담과업에 따른 분담비율 정확히 기재)

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

가) 건축 : 업체명 (비율: %)

나) 전기,통신,소방 : 업체명 (비율: %)

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

(별지 제12호 서식) - 대리인 입찰 참여시에만 제출(대표사)

위  임  장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ H.P:
(재)충남정보문화산업진흥원에서 시행하는 ‘충남 그린 스타트업 타운 조성 설계 용역’ 제안서 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2020년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐