충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역 - 과업설명서 -

2023. 12.

- 목 차 -

1. 총 칙	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 개요	1

1.3 과업의 범위	3

2. 과업의 내용	5

2.1 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2.2 일반 사항	8

2.3 행정 사항	10

3. 과업수행 지침	13

3.1 법령 등의 적용기준	13

3.2 설계 일반 지침	14

3.3 분야별 지침	17

3.4 설계진행 시 유의사항	33

4. 설계도서 작성요령	35

4.1 공통사항	35

4.2 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	36

4.3 설계도서 표기	36

4.4 도면작성	36

4.5 계획설계	37

4.6 중간설계	38

4.7 실시설계	43

5. 설계도서 납품목록	50

5.1 계획설계 납품도서	50

5.2 중간설계 납품도서	50

5.3 실시설계 납품도서	51

■ 붙  임	53

1. 총 칙`

충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업

1.1 과업의 명칭

○ 과 업 명 : 충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계

1.2 과업의 개요

⑴ 대지위치 : 충청남도 아산시 배방읍 장재리 2135번지 내

⑵ 대지면적 : 12,617.2㎡ (본 사업 사용면적 5,400㎡)

⑶ 지역·지구 : 준주거지역(아산탕정 택지개발지구), 연구개발특구, 중점경관관리구역

⑷ 건축규모

① 주용도 : 문화 및 집회시설-공연장

② 기준연면적 : 4,084 ㎡ (설계면적)

③ 건폐율 / 용적률 : 20% 이내 / 80% 이내

④ 높이제한 : 2층 이하 (변경 가능)

⑤ 설계범위 : 설계자는 해당 부지 범위 내에서 설계 지침에 따라 건축물의 배치, 동선, 내부공간계획, 외부공간 등을 자유롭게 제안할 수 있고 추후에 발생할 수 있는 증축을 고려하여 차량 및 배치계획을 하여야 함

[위치도]	[토지이용계획도]

⑸ 추정 공사비

① 공사비 :  15,642,000,000 원(부가세 포함)

② 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 신재생에너지설비, 폐기물처리, 수목식재, 인입비(전기, 상·하수도, 가스 등), 인테리어공사 등 모든 관련 공사비가 포함되어 있으며, 공종 간 최적화로 배분하여 제시된 공사금액 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.(증액 시 감독관과 협의조정)

※ 구입가구, 집기, 방송, 방송용조명, 음향장비, 무대장비, 무대조명, 무대LED디스플레이, 경기용 및 연습용 장비 비용 제외 (설계 반영, 별도 예산서 제출)

⑹ 설계 용역비 : 847,946,000 원(부가세 포함)

⑺ 용역기간 : 계약체결일로부터  240 일(공휴일 포함)

① 용역기간은 ‘충남정보문화산업진흥원’(이하 ‘발주기관’ 또는 ‘우리 원’)의 충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업계획 일정을 기준으로 하며, 사업일정 변경 시 조정될 수 있다.

② 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계의도 구현을 위한 설계자의 업무를 수행하여야 하며, 각종 인･허가업무 관련 자료의 제출 및 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

③ 과업일정 (일정 변경 시 감독자의 승인 필요)

㈀ 계획설계 : 착수일로부터 60일 이내

㈁ 중간설계 : 계획설계 완료일로부터 90일 이내

㈂ 실시설계 : 중간설계 완료일로부터 90일 이내

④ 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

㈀ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장

- 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

- 제7절 2. 계약기간의 연장

- 제7절 6. 용역의 일시정지

- 기타 천재지변 등의 요인으로 용역과업 수행이 불가능 할 때

⑤ 본 과업 수행과정에서 필요 시 다음 심의(자문) 또는 심사를 받아 과업을 진행하여야 한다.

㈀ 충남도, 아산시 경관조례 등에 의한 경관심의 및 건축설계자문, 건축위원회 심의 등 각종위원회

㈁ 기타 필요시 요구되는 자문위원회 등

⑥ 과업기간은 각종 위원회의 심의 및 인·허가에 소요되는 기간을 제외한 기간으로 이에 소요되는 기간은 적정한 범위에서 조정 예정

⑦ 용역기간은 층남 이스포츠 상설경기장 건립 사업계획 일정을 기준으로 하며, 사업일정 변경 시 조정될 수 있음.

⑻ 발주기관 및 연락처(사업담당)

① 주 소 :  충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 45-11

충남콘텐츠기업지원센터 2층 실감클러스터본부

② 연락처 : ☎  041-620-6476  / E-mail :  kps@ctia.kr

⑼ 공사계획

① 공사 발주 예정시기 :  2024.08.

② 공사예정기간 :  2024.08.~2025.11. (착공일로부터 15개월)

③ 공사 발주 방법 : 일반입찰 ※ 추진일정에 따라 변경될 수 있음

⑽ 계약(용역)의 중지․해지

① 아래와 같은 조건일 때는 본 계약을 중지․해지할 수 있다.

② 설계 납품이 지연되거나 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

③ 감독관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

④ 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

⑤ 기타 계약조건을 위반할 때

⑥ 중단 시 과업 진행 과정 및 결과물 확인 후 정산한다.

※ 발주처 사정에 따라 과업 중지시 중지기간에 대한 일수제한이 없으며, 용역비 증액 없음.

1.3 과업의 범위

⑴ 전 공종 건축 계획설계, 중간설계(기본설계), 실시설계

⑵ 각종 인증관련 설계 및 예비인증 취득, 인증 성과물 작성제출(인증관련 심의 및 심사)

- 녹색건축물 일반등급 이상(필수)

- 건축물에너지효율등급 1++ 이상(필수)

- 제로에너지건축물 4등급 이상(필수)

- 장애물 없는 생활환경(BF) 일반 등급 이상(필수)

- “신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진에 관한 법률” 시행령 제17조에 따른 설치계획서 제출과 제18조에 따른 설치확인(필수)

- 에너지절약계획서 제출 및 검토(에너지성능지표 평점합계 74점 이상)(필수)

※ 각종 예비인증 수수료는 용역금액에서 제외한다.

⑶ 각종 심의 업무(지방건축위원회, 경관심의위원회 심의 등)

⑷ 공사입찰안내서, 공사비발주를 위한 자료작성, 입찰방법 심의업무(지방건설기술심의 등) 수행 또는 협력

⑸ 인허가에 따른 각종 영향평가, 영향성 검토, 설계안정성검토 대상 등 해당되는 경우 해당 업무 수행 또는 협력

⑹ 기타 본 과업지시서에 명시되어있지 않는 이스포츠 경기장 건립을 위해 필요한 행정절차 및 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 업무 ․ 보고서 작성 등에 대하여 협의하여 이행

⑺ 도시계획시설 실시계획인가 용역의 경우 발생시 별도로 시행

2. 과업의 내용

2.1 과업수행 중 단계별 제출서류

⑴ 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 2 SET를 제출한다.

① 착수계 1부(공문포함)

② 책임기술자 선임계 1부

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

④ 과업수행계획서 1부.

⑤ 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

⑥ 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대기계장치, 음향시스템, 방송(송출)설비, 인터컴시스템 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

⑦ 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

⑧ 계약금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

⑨ 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

⑩ 인력, 장비투입 예정현황 1부

⑪ 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

⑫ 성능위주 소방설계 업무 수행계획서 1부(해당시)

⑬ 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서,  사용인감계, 등기사항, 공동수급협정서 등) 를 포함한 USB 및 전자파일

⑭ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

⑵ 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 (1)호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

⑶ 계획설계 도서 납품

① 계획설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

③ 관련법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연재해대책법 등 인허가를 득하기 위한 기타 관련법

④ 현장조사 결과보고서

⑤ 현황측량 성과도, 측량보고서

⑥ 유사시설 견학보고서

⑦ 경기장 프로토타입 계획안(산업디자인 포함) + 운영계획서

⑧ 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

⑨ 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

⑷ 중간설계도서 납품

① 중간설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

③ 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

④ 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

⑤ 녹색건축물 인증 일반등급 취득 관련 검토서 및 자료

⑥ 제로에너지건축물 인증 4등급 취득 관련 검토서 및 자료

⑦ 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

⑧ 예산초과 시 예산절감방안 검토서

⑨ 1단계 체크리스트 반영 검토 결과 및 2단계 체크리스트 작성 제출

⑩ 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

⑪ 신재생에너지 공급의무비율 34% 이상 설비 설치계획서

⑫ 에너지절약계획서 에너지성능지표 평점합계 74점 취득 관련 검토서 및 자료

⑹ 실시설계 사전 검수용 도서 제출(승인된 예정공정표 사전 납품일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 2부를 제출하여야 한다.

① 심사(실시설계 중간점검) 체크리스트 작성제출

㈀ 체크리스트 주요내용

- 설계설명(보고)서 검토(분야별)

- 실시설계 납품도서

- 실시설계도면 검토

- 발주용 내역서 검토

- 공사시방서 검토

- 구조계산서 검토

- 물량산출서 검토

- 단가산출, 견적서 검토

- 분야별 크로스 체크

② 내역서(원가 제비율)

③ 인허가용 설계도면

④ 계산서 및 물량산출서

⑤ 단가산출서, 견적서

⑥ 관련서류를 포함한 USB

⑺ 실시설계도서 납품(심사 체크리스트 검토 결과 반영)

① 실시설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

③ 실시설계도서 일체

④ 공사예정공정표(공사기간 산출근거 포함)

⑤ 종결보고서

⑥ 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

⑦ 설계검사원

⑧ 장애물 없는 생활환경 예비인증서

⑨ 녹색건축물 예비인증서

⑩ 건축물 에너지효율 예비인증서

⑪ 제로에너지건축물 예비인증서

⑫ 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

⑬ 신재생에너지설비 설치계획서 검토 관련 증빙서류

⑭ 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공예정일까지 산정)

⑮ 성능위주 소방설계 심의 관련 서류(해당시)

⑯ 화재 및 피난시뮬레이션 결과 보고서

⑰ 공사 입찰방법 심의자료 및 입찰안내서

⑱ 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

⑲ 건축모형 100:1 제작 납품

⑻ 기타 서류

① 용역의 공정보고

㈀ 주간공정보고 [붙임 6]

㈁ 월간공정보고 [붙임 7]

② 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2.2 일반 사항

⑴ 설계자의 업무기준

① 본 과업의 건축물은 본연의 기능을 충분히 발휘할 뿐만 아니라 지역사회와 조화를 이루며 이용자들에게 편의성과 안전성을 제공하고, 미래의 변화에 대응할 수 있는 공간의 확장성과 융통성을 갖도록 설계되어야 한다.

② 설계용역 착수와 동시에 용역 관계자는 설계용역의 목적과 과업내용을 완벽히 숙지하여야 한다.

③ 설계자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

④ 설계자는 수급문제로 정상적인 공정이 방해되거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료, 공법 또는 기타 요소로 설계하여서는 안 된다.

⑤ 설계자는 관련법규와 계약조건, 발주자의 요구조건을 만족하는 설계를 하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 발주자에게 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주자와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

⑥ 설계자는 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

⑦ 설계자는 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 발주자에게 보고 후 적용기준을 결정하여야 한다.

⑧ 설계자는 용역 종료 후에도 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출 서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주자가 이에 대한 보완자료 및 변경도 서를 요구하는 경우 설계자 자신의 비용으로 지체 없이 이를 수행한다.

⑨ 설계자는 용역 수행시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주자와 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

⑩ 태양에너지, 지열, 연료전지 등 신재생에너지 사용 및 환경친화형 설계 등에 따른 공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요 예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주자의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하도록 한다.

⑪ 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

⑫ 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수 하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업지시서를 우선 적용하되 발주자와 협의하여 진행한다.

⑬ 본 과업지시서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

⑭ 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

⑮ 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수있다.

⑯ 설계도면은 “건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시) [별표] 설계도서 작성방법에 따라 계획설계, 중간설계(기 본설계), 실시설계 도서를 작성한다.

⑰ 안전사고 예방사례를 분석하여 위험공종을 목록 화하고 안전사고 예방을 위해 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

㈀ 콘크리트 타설 등 주요 공종시 안전대책

㈁ 우기 및 동절기 안전대책

㈂ 유지관리 종합안전 대책 등

⑵ 계약 관계

① 본 과업지시서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 발주자와 협의하여 정한다.

② 업무 내용의 변경은 발주자와 설계자가 문서를 통해 상호승인한다.

③ 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정 및 계약해제 및 해지 등은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제 14장 용역 계약 일반조건(행정안전부 예규)에 따른다.

④ 발주자는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생시 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 하고 정산하거나 범위를 변경할 수 있다.

⑶ 기성 지급

① 계획설계 완료시 : 30% (※ 계획설계 보고회 완료 및 중간설계 착수 시)

② 중간설계 완료시 : 20% (※ 건축인허가 완료 시)

③ 실시설계 완료시 : 40% (※ 실시설계 도서 납품 및 과업기간 종료 시)

④ 용역 준공시 : 5% (※ 계약심사 ‧ 일상감사 완료 및 사업자 공모 공고 시)

⑤ 설계 인수인계 등 후속절차 완료 시 : 5%

⑥ 기성지급 계획은 계약자와 협의하여 조정할 수 있다.

⑷ 기타

- 설계용역 성과물에 대한 모든 저작권 및 활용권은 저작권법에 따른다.

2.3 행정 사항

⑴ 공정계획 작성

① 설계자는 네트워크 공정표 또는 발주자가 동의할 수 있는 공정표를 제안하고 승인을 받는다.

② 모든 일정이 서술되어야하며, 설계자는 발주자가 승인한 공정계획에 의한 업무 이행에 책임을 진다.

⑵ 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직

① 총괄은 책임(대표)건축사가 이행한다.

② 전기분야는 전력기술관리법에 의한 유자격자, 정보통신분야는 정보통신공사업법에 의한 유자격자, 소방분야는 소방시 설공사업법령에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 한다. 단, 제연설비는 전문 소방시설설계업등록자(기계)가 설계하여야 한다.

③ 조경분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 조경분야 기술사사무소를 개설한 자, 토목분야는 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체로 신고를 필한 업체의 토질 및 기초기술사, 구조는 건축구조기술사가 설계하여야 한다.

④ 기타 관련법령에 의하여 적법한 업종을 등록한 업체가 용역을 수행하여야 한다.(공동수급-산업디자인분야 등)

⑤ 상기 책임기술자 및 참여기술자는 타 공종과 유기적·상호 보완적 관계를 검토하여 설계하여야 한다.

⑶ 업무협의 및 공정보고

① 월간업무(공정)보고

- 매월 말 오전 10시까지 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.

② 수시보고

- 문제 발생 시 문제점을 분석하여 발주기관에 제출하고 처리한다.

③ 일반사항

㈀ 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의한 다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

㈁ 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정 한다.

㈂ 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

㈃ 책임기술자는 회의에 필요한 자료의 작성과 회의 참석 의무가 있다.

㈄ 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관 및 자문위원회의 보완/수정 요구사항에 대해 관련 법령 및 지침, 사업 규모와 예산 등 사업계획에 저촉되지 않는 한 이에 따라 반영한다.

④ 업무 착수회의(각 보고회 시 사업책임기술자 참석 필수)는 착수일로부터 14일 이내 개최한다.

⑤ 필요시 중간보고회 및 최종보고회를 개최한다.

⑥ 각종 업무보고 및 회의사항은 회의록을 작성하고 참석자 서명을 받은 후 발주기관에 제출한다.

⑦ 다음과 같은 경우 업무 협의를 한다.

㈀ 각종조사 및 자료 수집완료 또는 주요공법 결정시

㈁ 계획설계 / 기본(중간)설계 / 실시설계 각 설계 완료시(유지관리 계획 포함)

㈂ 각종 심의, 심사 및 자문회의, 기타 공적 협의시

㈃ 공정보고 및 준공, 성과품 작성시

⑷ 관련기관 협의

① 설계자는 과업수행 전 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상하수도관, 전기, 전화, 통신망 등) 등을 사전 확인 후 발주자에게 보고하여야 하며, 관련 설계는 관련기관(부서)와 협의 이행 후 진행하여야 한다.

② 설계자는 본 설계과업의 완료에 필요한 각종 관련기관, 부서 등의 협의, 신고허가, 설계변경 등 행정절차 이행에 필요한 관련서류 작성, 제출, 수행하여야 하며, 결과는 설계에 반영하여야 한다.

③ 설계자는 실시설계완료 후 건축법에 의한 ‘공용건축물 건축협의’를 위해 관련 서류 작성 및 협의 업무를 수행하고, 협의조건은 설계에 반영하여야 한다.

④ 발주자와 관련부서의 단계별 설계안 검토의견을 적극 반영하여야 한다.

⑤ 인허가나 협의 승인시 소요되는 제반비용은 설계자가 부담한다.

⑸ 보안 및 비밀유지

① 설계자는 발주자와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료를 발주자 승인 없이 공개해서는 안되며, 모든 성과품을 이를 공개, 공모 기타 이와 유사한 다른 행위에 앞서 발주자에게 최초로 제출하여야 한다. 보안상 유출 등으로 발생하는 문제는 설계자가 책임진다.

⑹ 하도급의 범위

① 수급인은 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

② 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

㈀ 각종 조사(지반조사 등), 측량 및 이와 유사한 작업

㈁ 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

㈂ 건축구조, 기계설비, 전기‧정보통신, 소방, 토목, 조경, 의장(인테리어) 등의 설계업무

㈃ 장애물 없는 생활환경 등 각종 예비인증 취득에 필요한 작업

㈄ 구조계산 및 검토와 빌딩풍 및 풍동시험에 관한 업무

㈅ 건설공사의 수량 및 견적업무

㈆ 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

③ 설계자는 발주자로부터 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

㈀ 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

㈁ 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

㈂ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

④ 설계자는 하도급인을 선정할 때 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

㈀ 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

㈁ 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

⑤ 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금으로 지급하여야 한다.

⑥ 설계자는 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여도 책임을 진다.

3. 과업수행 지침

3.1 법령 등의 적용기준

⑴ 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기사업법, 화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률, 소방공사업법, 지적법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시 교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

⑵ 상기 지침 제24조(설계도서 작성기준)에 따라 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

⑶ 설계 중 개정되는 관련 법령, 지침은 최신규정에 따른다.

⑷ 본 과업은 「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

① 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은「건축구조기준」<표 0306.3.1>을 이용하여 결정한 S 값의 100%보다 작아서는 안된다.

⑸ 수급인은 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

⑹ 설계의 책임 및 손해배상

① 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체 상금)에 의거 조치한다.

② 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함하여 책임지며, 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치한다 (이의제기 불가).

③ 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

㈀ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제55조

㈁ (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

㈂ 지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4, 제16조의6

㈃ 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

㈄ 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

㈅ 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시 제2017-219호)

㈆ 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

④ 대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

3.2 설계 일반 지침

⑴ 수급인은 건축법 등 관련 법규상 사업수행가능한지 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용한다.

⑵ ｢건축법｣시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣제3조(관계전문기술자의 협력사항)에서 정하는 기술자의 협력을 받는다.

⑶ 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

① 대지현황 및 주변 인접지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영한다.

② 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

⑷ 수요를 감안한 미래지향적 시설 설계

① 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

② 공동구, Pit 등 부식 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 고려하여 설계한다.

③ 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용한다.

④ 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용한다.

⑸ 대지주변이나 건축물 내 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 수립하여 설계한다.

⑹ 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

① ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’, ‘건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다. 특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생에너지(신재생에너지 공급비율 34% 이상) 등 각종 냉난방설비 별 장· 단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

② 건축허가 시 한국에너지공단으로부터 에너지절약계획서 검토를 득한다.

③ 저탄소 녹색성장 기본법관련 ‘공공부문 온실가스‧에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침’에 따른 온실가스 감축 목표를 달성할 수 있는 요소를 반영한다.

④ 창호, 내‧외벽, 슬래브, 지붕 등 외적요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계한다.

⑤ 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계한다.

⑥ 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물용도와 실에 따른 적정 조도를 반영한다.

⑦ 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

⑺ 환경 친화적 부지 조성

① 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우‧오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

② 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물 적게 발생하도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

⑻ 방범, 방재 예방적이며 유지관리 용이한 설계

① 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

② 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하며 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

⑼ 안전성과 시공성이 확보된 설계

① 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조로 설계한다.

② 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획을 세워 설계한다.

⑽ 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요)

① 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립‧반영하여야 한다.

⑾ 설계에 사용하는 재료

① 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(KS), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구 성, 유지보수 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정, 설계에 반영하여야 한다.

② ①을 적용할 수 없는 재료는 발주자의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS 및 표준시방서 규정 동등 이상의 규격을 사용하도록 설계도서에 명시하여야 한다.

③ 마감자재는 공간의 활동성 및 실 기능(도서열람, 행사, 강연, 업무 등)에 적합한 환경친화적‧경제적인 자재를 사용한다.

④ 관급자재의 선정

- ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣시행규칙 제86조 및 ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 하며, 발주기관으로부터 선정검토서 승인을 득한후 설계에 반영하여야 한다(관급자재 선정을 위한 절차에 적극 협조)

⑤ 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영한다.

⑥ 설계자가 특정공법, 기술을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

⑦ 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임8]의 양식에 따라 작성하여 승인받는다(특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

3.3 분야별 지침

⑴ 건축 계획

① 기본 방향

㈀ 사업시행 부지의 도시계획(지구단위계획 포함), 교통 영향분석 및 개선대책 등 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용 계획과 규제사항을 확인하여 계획에 반영

㈁ 기타 다음 사항을 고려하여 계획

－ 건축물의 이미지 제시

－ 미래변화에 대응할 수 있는 가변성․ 확장성을 고려한 공간 확보

－ 합리적 건물관리 및 에너지 절약 시스템

－ 환경친화적 계획

－ 편의시설(장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률) 계획

㈂ 건축물의 목적에 부합하며 친환경적·효율적·쾌적·창의적인 공간으로 계획

㈃ 첨단 이스포츠 경기장의 이미지에 맞는 외장마감을 선정하고, 안전성과 조형미를 살리면서 공공건축물로서 상징성이 부각되도록 계획하며 주변경관 및 건물 등 주위 환경과 조화로운 외관을 연출

㈄ 내·외부 마감자재는 개별 공간의 특성 및 디자인을 잘 표현하도록 선정하되 재료의 친환경성, 우수한 시공성을 고려하여 제시

㈅ 내·외부 사용재료는 특정 제한을 두지 않으나 제반 법규에 적합하며 내구성 및 유지관리가 우수하도록 합리적으로 선정(예산 범위 내)

㈆ 건물외관상 창호계획은 중요한 요소임을 감안, 디자인, 보안, 안전성, 친환경인증 등을 고려하여 계획. 또한, 창의 크기 및 형태는 개방감과 세부공간의 기능 및 에너지 효율, 소음방지 등을 고려. 입면계획시 BIPV(건물일체형태양광시스템) 등을 고려하여 신재생에너지 공급비율 제고방안을 함께 검토한다.

㈇ 건축부분의 설계는 토목, 기계, 전기, 정보·통신, 조경, 소방, 기타 부대시설(무대기계장치, 음향시스템, 방송(송출)설비, 인터컴시스템 등) 다른 공종과 연관이 가능하도록 계획

㈈ 사업 부지의 도시계획 및 관련법규와 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용 계획과 규제사항을 확인하고 계획에 반영

㈉ Space Program을 참고하여 각 시설들은 사업비 및 제한범위 내에서 설계자의 의도에 따라 제안 가능

② 배치계획

㈀ 지구단위계획 시행지침의 전면공지 및 차량출입불허구간 등을 확인하고 지침의 기준에 적합하도록 계획

㈁ 부지로의 접근성과 인접 지식산업센터와의 연계를 고려하되 개방되고 흡인력 있는 배치계획 고려(설계제안공모지침서 5.3 예시안 참조)

㈂ 차량 및 보행자 동선 고려 시 기능적 측면(선수 및 관계자, 방송 및 운영자, 관람객, 관리자 등)도 복합하여 고려할 것

㈃ 시설물은 관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 계획

㈄ 이용자를 고려하여 중심기능과 서비스 기능 간의 배치를 고려

㈅ 주 진입부와 주변공간에 대하여 시․지각적 인지성이 있도록 표현

③ 평면계획

㈀ 동선을 최대한 간결하게 계획

㈁ 적정한 여유 공간(홀, 로비, 휴게, 편의, 전시 등)을 확보하여 상호 유기적으로 사용이 가능하고 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 계획

㈂ 공간의 가변성을 확보하고 확장 및 변화 가능성을 고려

㈃ 쾌적한 분위기를 조성하되 공간 효율이 극대화할 수 있는 공용공간 계획을 수립하여 Dead space가 발생하지 않도록 계획

㈄ 어린이, 노약자, 장애인에 대한 장벽제거(Barrier-Free) 뿐만이 아니라 모든 사용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인 반영

㈅ 각종 사고 및 재해를 고려하여 인명, 장비, 시설 등의 피해 최소화 되도록 동선, 공간 및 관련시스템을 계획하되, 특히 예방을 최우선으로 하는 설계방안을 함께 제시

㈆ 방문자의 특성을 고려하여 대민시설, 공용시설, 관리(업무)시설 등에 대한 보안대책 수립

㈇ 공기 단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로이 검증된 공법과 첨단기술 등을 적극 도입

㈈ 내부 장비 및 부속시설의 규모를 고려하여 장비 이동 및 관리에 불편함이 없도록 계획

㈉ 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려

㈊ 공동 사용부분은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌한 동선 분리를 하며, 방문객 및 제실자의 방향감각을 명확히 유지하고 단순화 할 수 있도록 시설별 인지도 제고 계획을 수립

㈋ 설비시스템 효율성 높이도록 계단, 화장실, 샤프트를 집약 배치, 피난거리 고려 계획

④ 전용경기장 및 다목적경기장 공간 계획

㈀ 기자와 관중의 동선 분리 및 선수영역 확보

㈁ 관중 퇴장시간 10~15분 이내 이루어 질 수 있도록 출입구와 통로 계획

㈂ 1차 가시거리 22m를 넘지 않는 관람석 계획

㈃ 다목적경기장 500석 규모의 극장형 경기장의 변형으로 다목적 공간 계획 (open stage형)

㈄ 객석은 수납식으로 구성하여 경기장을 다목적(강연·컨퍼런스·음악·연극 등 다양한 행사)으로 활용할 수 있도록 계획

㈅ 아레나형(스포츠) 보다는 프로세니엄(극장형)으로 가변적 구성이 가능하도록

㈆ 전용경기장은 50석 규모의 아레나형을 우선 검토

㈇ 방송장비 및 행사장비의 반출입이 용이할 수 있도록 수직 수평 동선 계획

㈈ 경기장의 건축음향 계획

㈉ 천정고를 10m이상 확보하여 LED 디스플레이등의 미디어 장치를 수직 방향으로 이동할 수 있도록 설치하여 공간을 가변적으로 활용할 수 있도록 계획

㈊ 특수조명 : 생동감 있는 중계를 위한 2000룩스 이상의 입체조명

㈋ 디지털미디어 디스플레이 : 전광판, 대형화면 등 디스플레이를 활용하여 다양한 공간 연출이 가능하도로 구성

㈌ 각 분야별(건축, 무대기계장치·무대음향·무대조명, 영상 등) 기능이 연계되어 최고의 경기장 운영이 되도록 계획

⑤ 부대시설 및 보조시설 계획

㈀ 선수 편의 시설 극대화 : 선수를 위한 경기장, 방송출연자가 아닌 경기력을 높이는 환경 필요

㈁ 선수라운지는 선수가 대기하는 휴식공간으로 구성하되, 간단히 워밍업할 수 있도록 PC장비를 갖출 것

㈂ 관계자시설 : 진행, 해설, 심판대기실, 기자실 공간계획

㈃ 프레스센터 및 본부석은 라운지 공간과 가까이 배치하여 계획

㈄ 방송진행시설 : 편집실, 서버실, 옵저버실(이스포츠경기 모니터링, 심판보조) 등 공간계획

㈅ 관람객 편의성 극대화 : 휴게 편의 공간 조성

㈆ 카페는 방문객의 취식을 위한 공간으로 구성하되, 가능한 공용부 인근에 배치할 것

㈇ 카페는 최소 10명 이상이 동시 사용할 수 있는 공간규모로 계획하며, 열린공간으로 하여 SHOP 등의 기능을 포함하여 50명 이상 기능을 수용할 수 있도록 구성

㈈ 업무, 회의 등 다목적으로 활용 가능한 별도의 라운지 공간을 최소한 1개소 계획하되, 권장설비인 준비실, 세미나실, 진행실과 근접하도록 배치

⑥ 관리시설 계획

㈀ 관리실은 관리사무를 보는 개방형 공간으로 5~7인 정도 상주하는 규모로 고려할 것(별도의 개실 공간은 없음)

㈁ 1인당 사무용 책상 1개(컴퓨터 사용 위주), 협탁 1개를 기본 모듈로 구성

㈂ 서류 수납을 위한 공간(수납장 또는 창고 등), 비품 공간, 탕비공간 및 소규모 회의공간을 계획할 것

㈃ 사무공간은 별도의 냉난방 조닝을 하여 독립적 운용 가능하도록 할 것

㈄ CS센터는 메인 로비에 가깝게 배치하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 주변부 공간에 배치하는 경우 관람객 존에 가까운 고객동선으로 계획

⑦ 공용공간 계획

㈀ 메인 로비는 주출입구와 연결하여 활기차고 즐거운 분위기를 조성하는 공간으로 구성

㈁ 메인 로비는 팬미팅, 전시(명예의전당, e스포츠 역사 등) 등을 할 수 있는 공간으로 구성

㈂ 층별공간 안내 및 지원시설 구비

㈃ 일반적인 공간에 적합한 평바닥 계획

㈄ 화장실은 최신식의 현대 트렌드에 맞춰 공간 계획

㈅ 화장실을 이용하는 방문자들에게 편안한 공간이 될 수 있도록 조성

㈆ 장애인화장실은 기준에 적합하도록 조성

⑧ 단면계획

㈀ 건물 특성, 외부공간과의 조화, 이용자 쾌적성, 설비 공간, 건축물 에너지절약 설계기준(국토교통부) 등 수직적 요소를 분석한 후 실 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 효율적으로 층고 및 건물높이를 계획

㈁ 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성있게 수직 동선이 원활하도록 계획, 다양한 실용도 및 천장 높이를 감안하여 층고를 산정

㈂ 주변 건물 및 도로와의 연계성을 고려하여 합리적인 지반선(G.L.)을 계획하고, 지반면은 해당위치의 인접 도로 및 부지의 지표면보다 낮아서는 아니 됨.

㈃ 각 실은 가능한 자연채광으로 쾌적한 환경을 조성토록 하며, 기타 시설에 대해서도 필요 시 자연채광을 고려하여 계획

㈄ 우수 침투 방지, 장애인 시설기준 적합성, 주변 환경과 조건을 검토하여 1층 바닥높이 계획

㈅ 각 공간별 독립성 확보, 소통 및 가변성 구현, 운영·관리·업무상 유기적 연계로 효율성을 극대화하는 다양한 조닝 (Zoning) 계획을 수립

㈆ 가급적 건물 내부 단차가 발생하지 않도록 계획하여 계단 및 램프 설치 개수의 감소를 통해 시공성을 향상

㈇ 실의용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하며, 구조시스템 및 기계·전기·공조설비 및 특수설비(전산서버장치, 항온항습, 클린룸 등)를 충분히 고려하여 제안

㈈ 기능별 최소한의 층고에 대한 지침을 마련하여 불필요한 공사비의 낭비요인을 배제하며, 예산범위를 넘지 않도록 계획

㈉ 건물 입구에 캐노피 또는 차양 고려(구조물 설치 또는 형태구성)

㈊ 재해 및 사고로부터 신속한 인명보호를 위하여 안전계획을 수립(수직/수평 피난동선)

㈋ 건물 내의 특정실[카페테리아, 주방 등]의 냄새 등이 건물 내에 확산되지 않도록 계획

- 기계적 환경(환기설비 등)과 별도로, 물리적인 환경적 개선방안 도출

⑨ 보행 및 차량 동선 계획

㈀ 주 진입구간, 차량동선, 보행동선계획은 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 등 관련법령 등을 따라야 하며, 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획

㈁ 인접한 주차장과의 연계 또는 간섭을 고려한 보행자 및 이용자 동선 계획 수립

㈂ 출입자 특성을 고려해 보행자, 차량 동선 등을 분리하되, 주변 건물 및 자연환경과 연계 되도록 계획

㈃ 보행자 동선을 단순하고 명쾌한 체계가 되도록 계획하고 방문객의 특성을 파악하여 보안을 고려

⑩ 실내마감 계획

㈀ 내부시설의 특성을 표현하며 아름다움, 통일성 및 개별적인 독창성, 창의성, 실용성 등을 동시에 만족할 수 있도록 창의적으로 계획

㈁ 주요 실은 표준화와 특성화로 크게 구분하여 계획하되, 표준화 실은 일반적인 실내재료 마감표를 참고하여 동등이 상의 마감재로 계획

㈂ 특정한 실은 반드시 별도 실내마감 계획을 도면에 작성하고, 투시도 및 4면 전개도를 작성(해당 특정 실(4개실 이상)은 추후 발주기관과 협의)

㈃ 사무실 내부벽체는 오픈형/가변형 공간으로 구성하고, 기능에 충실하고 안전을 보장할 수 있는 실내재료로 계획

㈄ 실내재료는 예산 내에서 다양하고 독특한 느낌을 주며, 기능성을 충족하는 재료를 선정

㈅ 실내 조닝별 색채디자인 계획

⑪ 주차계획

㈀ 주차장은 요구주차대수를 만족하여야 하며, 향후 주차수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획하며, 방문객들을 고려하여 계획

㈁ 대형버스의 이용을 위한 주차공간을 1면 이상 계획 (권장)

㈂ 지구단위계획에서 정한 차량진출입 허용구간을 지켜 계획하되, 동일 대지에 계획중인 지식산업센터와의 차량동선 계획을 고려할 것(설계제안공모지침서 5.3 예시안 참조)

㈃ 방송장비 등을 하역할 수 있는 공간 마련 : 대형트럭(10TON)이 진입하여 방송장비를 하역할 수 있는 공간 계획과 하역장에서 경기장(전용·다목적)으로의 운반 계획(1TON트럭 진입 가능)을 고려하여 계획

㈄ 주차장은 별도의 부출입구를 두어 긴급상황 시 이용할 수 있도록 계획

㈅ 명확하고 원활한 차량 동선 체계를 확립

㈆ 화재, 방재 시 긴급 피난․구조를 위한 차량 등의 진입공간을 계획한다.

㈇ 교통흐름에 대해서는 차량의 접근을 체계화하고 이용 상에 간섭이 없도록 하는 등 필요한 체계를 구성한다.

㈈ 장애인 전용 주차대수는 ‘아산시 주차장 설치 및 관리조례’에 의거 계획하되, 전체 주차대수를 감안

(2) 구조 계획

① 관련 규정에 적합하며 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토, 유해한 영향을 미치지 않도록 설계(다목적경기장의 다양한 행사를 위한 하중 반영)

② 구조물의 안전이 우선되어야하며, 관련법규 이상의 처짐, 진동현상 등이 발생하여서는 안 됨

③ 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하며, 특수구조이거나 시공 상 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 함

④ 기능이 적절하고 안전한 구조로 하며, 예외없이 일반적인 구조해석을 통하여 내력을 확인할 수 있어야 함

⑤ 구조의 안전성능은 건설관계법령 및 정부, 학회 또는 국토교통부 산하 건설 연구소 등에서 정한 현재 최신 설계기준에 충족하며, 국내 기준에 규정되지 않은 사항에 대해서는 해외기준을 준용

⑥ 기둥으로 인한 공간효율 저하를 최소화하고, 조직개편 및 업무변화, 다양한 공간수요에 대응하는 오픈형/가변형 공간을 실현하기 위해 비용 및 안전성이 확보가 되는 구조방식을 적극 검토․적용하는 설계방안 제시

⑦ 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 계획

⑧ 구조형식 및 단면의 크기는 시공성 및 경제성을 고려

⑨ KBC Code(건축구조기준)의 지진하중 근거에 의거하여 건축물 내진설계를 적용

⑩ 재난과 지진, 풍하중 등 각종 변형을 고려하되, 건물 외벽 등은 법적 기준에 따른 풍속 및 적설하중에 견디도록 함

⑪ 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방법을 채택

⑫ 건물의 생애주기(LCC)측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하고 시공여건을 충족시킬 수 있도록 설계

⑬ 공조실, 발전기실, 기계실 등은 내부 발생음을 흡수할 수 있는 구조방식을 채택

⑭ 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하여야 하고, 시공여건을 충족시킬 수 있도록 설계

⑮ 중력하중 및 횡하중에 대하여 충분한 내력을 갖추고, 각종 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계

⑶ 시공 계획

① 설계진행 단계별 설계설명(보고)서 제출 시 각 설계안에 따른 시공상 문제점을 분석하고 이에 대한 대책과 적정한 시공방법을 각 보고서에 포함

② 필요할 경우 특수공법과 신소재를 제안할 수 있으며, 이때 선정 사유를 객관적으로 인정할 수 있는 자료가 있어야 함

③ 공사예정 부지의 여건과 설계안의 건축계획을 종합적으로 고려하여 적정한 가설공법 및 건설장비 투입방법을 설계 진행보고서에 포함

④ 공사기간 15개월을 감안한 실시 설계 반영

⑷ 토목계획

① 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성 극대화와 자연환경의 보존 및 경제성을 고려하여 계획

② 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 관련 기준에 초과하지 않도록 굴착방식을 선정

③ 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정

④ 지하굴착 시 발생되는 토사량이 최소화 될 수 있도록 계획

⑤ 우수, 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 배수시설 등을 조사하여 배수의 원활함을 기하고 부지의 특성에 맞게 계획

⑥ 도로 및 보도의 포장은 친환경성, 안전성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사용자의 편의성 등을 고려하여 적정 포장재를 선정하며, 포장단면은 동결지수, 교통량, 토질조건 등을 고려하여 계획

⑦ 토목포장, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우·오수 계획 등은 주변 환경과의 친화성 및 연계성을 고려하여 친환경적 계획

⑧ 주변 지역여건과 환경조건을 파악하여 유지 및 관리가 용이하고 경제적인 계획을 수립

⑨ 일반 토목법규 및 지침 등은 현재 최신기준을 준수하여 설계에 반영하고, 굴착 등 공사시 주변 건축물 및 시설물에 피해가 발생되지 않도록 주변 현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 공법 선택

⑩ 현장상황에 부합되고 경제적인 토목공종, 장비 및 자재를 선정하여 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되어야 함

⑸ 기계설비 계획

① 본 부지의 유틸리티(상수도, 지역열원, 도시가스, 하수도 등) 인입 조건과 환경조건(기후, 강수량 등)을 종합·분석하여 기계설비의 안전성, 기능성, 경제성, 유지관리, 변화가능성 등에 중점을 두어 계획(쾌적하고 환경 친화적인 설비 지향)

② 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 설계기준 관계법규, 지침, 조례, 정부의 제반규정, ｢건축기계설비공사 표준시방서｣ 및 각종 시행기준, 관계부처 지시사항 등 국내 설비관계법규의 제반규정을 기준으로 설계하며, 관련규정이 개정 되어 서로 상이할 경우 규제내용이 강화된 것으로 적용

③ 건축물의 시설 특성상 공조 구획별, 시간대별 공조시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조방식 등 각종 시스템 선정 시 유사규모/유사시설의 에너지 소비량을 고려한 복합시스템을 구축

④ 각종 사고 및 재해, 불의의 사고를 고려한 제어 가능한 관련 시스템을 계획

⑤ 냉난방공조방식은 시설(실)별 부하특성, 실내의 온도, 습도, 기류, 청정도 등을 고려하여 공기조화방식에 대하여 충분히 검토(유지관리, 에너지 절약 등)하여 최적의 방식으로 선정

⑥ 냉난방공조방식은 층고를 고려하여 효율성과 쾌적성을 높일 수 있도록 천장공조 또는 바닥공조를 함께 고려하여 계획 하고, 햇빛의 영향을 고려한 합리적인 조닝(구역설정(무대와 관람석은 구분)/공조기배치/부하분산)을 통해 냉난방의 효율을 높일 수 있도록 하며, 적절한 온·습도 유지가 되며, 중앙제어장치에서 모든 것이 통제·조절·관리가 되도록 설계방안 제시

⑦ 개별 냉난방설비의 중앙제어장치(각실 On/Off 기능, 온도 조절기능, 온도표시기능, 전력피크제어)는 중앙제어 및 감시장치, 현장제어장치, 입출력 모듈 등으로 조합 구성을 계획하며, 통합관제실에서 일괄운영 및 관리가 가능토록 계획

⑧ 통합관제실, 전산관련, 정밀 측정을 요하는 실 등에는 항온, 항습시설로 설계하고, 24시간 개방 공간 등 사용특성에 따라 별도 공조방식을 도입하며 에너지 절약과 유지관리 제어가 우수한 방식을 적용, 실외기는 효율 확보를 위해 옥상 또는 외부에 설치함

⑨ 신기술 및 신공법의 장단점을 비교 검토하여 건물의 특성 및 규모에 적정한 방식을 설계에 반영

⑩ 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며, 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템 가동중단이 없도록 계획

⑪ 관리가 용이하여야 하며, 정전이나 고장 등의 비상사태에 즉시 대응할 수 있는 구조

⑫ 주요설비에 대한 Life Cycle Cost를 고려하여 초기투자비 ․ 운전경비 ․ 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 적용하며, 유지보수 ․ 장래 설비의 증설 또는 변경을 고려하고, 에너지절약 설계기준에 적합하며 쾌적한 실내 환경이 조성되도록 계획

⑬ 유지관리 및 보수의 편의성 확보를 위하여 기기·장비의 표준화 및 모듈화를 도모하고 보수 점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하되, 향후 용량증가에도 적절히 대비할 수 있도록 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 설계

⑭ 정부의 에너지 정책 및 경제성, 에너지 절약, 환경오염방지 대책 등을 종합적으로 검토하여 최적의 열원 시스템을 선정하고 에너지 손실을 최소화할 수 있는 친환경 시스템을 구축하며 조달청 우수제품, 신기술, 고효율 친환경 인증 제품의 사용을 적극 검토 반영

⑮ 열원설비는 각 실에 설치될 장비에 대한 발열부하를 반영한 냉난방 부하 설계, 열원 공급의 신뢰성을 확보할 수 있고 에너지 효율이 높으며 생애비용(운전비 등)이 적고 유지관리가 용이한 제품 및 시스템에 적합한 것을 선정

⑯ 심야전기, 도시가스, 집단에너지, 소형 열병합발전, 신재생에너지 등 다양한 에너지원을 고려하여 에너지비용을 절감 하며, 에너지부족 시에도 이용에 지장이 없는 냉방방식 및 시스템을 제시

⑰ 소음 및 진동 등의 영향을 고려한 정숙하고 쾌적한 환경이 조성되도록 계획

⑱ 건축물의 신축변위, 부동침하 등을 검토하여 각종 설비의 연결부위는 변형에 대비한 설계를 반영

⑲ 주요기기와 장비는 공인기관(국공립성능인증기관, 정부출연기관, 한국기술협회 등)의 에너지효율 및 성능인증제품을 득한 제품을 사용

결로 발생과 파이프의 누수 등에 따른 자료 및 실의 오염을 방지하기 위하여 항온항습구간의 상부에는 파이프배관 설비 등의 배치를 지양

승강기는 건물 규모, 층수, 근무인원 및 내방객 등을 고려하여 적정하게 계획. 사용자 안전을 강화한 플랫벨트를 적용하고 에너지 절감 시스템이 적용된 제품으로 계획(전용경기장,다목적경기장 등 추후 다양한 행사 운영에 따른 대형 장비(1톤트럭 진입) 반입이 가능하도록 계획)

건물 실내공기의 질(IAQ : Indoor Air Quality) 향상을 위하여 건축적, 기계적 사항을 고려하여 공기정화 및 환기 설비를 계획

본 과업에 적합한 신공법, 신기술은 적극 반영 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하되 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획.

위생기구(세면기, 소변기, 수전, 양변기 등)는 절수기구를 사용하고, 중수도 시설 등 에너지절감시설 도입하며 비데 설치 반영, 연결 급수는 위생적으로 설계

화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 악취가 확산되지 않도록 자연환기와 강제배기를 병행 가능하도록 하며, 남 ⋅여 화장실의 구성비는 최근 신축되는 건축물의 추세를 반영하여 계획

배수 및 통기관 설비는 중간 막힘이나 악취, 역류현상 방지 및 배관내의 흐름을 원활히 하도록 고려하여 설계

급수 및 소방 설비는 단수 및 정전될 경우 즉시 대응가능하도록 계획

친환경 설계 관련 세부 사항

㈀ 고효율 에너지 기자재 인증제품 적극 사용

㈁ ESCO(에너지절약전문기업)사업 타당성 여부 적극 검토

㈂ 신‧재생에너지(태양광 등)의 활용계획 및 적용방안 수립

㈃ 에너지정밀진단(조명에너지 절약 등) 계획 수립

기계실은 회전기기류의 소음과 진동발생에 대한 방음, 방진 설비를 설계에 반영하고, 결로 등이 발생되지 않도록 환기설비를 적정하게 계획하며, 장비반입 계획을 반드시 설계에 반영

주차장 또는 지하주차장(필요시)

㈀ ‘주차장법 시행규칙’에 의거하여 일산화탄소(CO)농도가 실내주차장은 25PPM이하, 그 외는 50PPM이하로 유지될수 있도록 하고 효과가 확실히 검증되거나 보증된 방식으로 계획

㈁ 지하주차장의 급‧배기용 팬은 대수제어 또는 풍량조절, 일산화탄소(CO)의 농도에 의한 자동(on-off)제어 등 에너지 절약적 방법을 도입 [화재시 발생되는 연기를 배출할 수 있는 용량을 고려하여 설계반영]

㈂ 지하주차장에서 발생되는 일산화탄소 및 기타 폐가스가 원활히 배출되어 주차장내 오염공기 정체구역이 최소가 되도록 계획

자동제어시스템은 본 건축물 규모에 적합한 것으로 선정하여 기능이 우수하고, 온‧습도 조절 가능하며 주요 제어대 상은 통합관제실에서 기기 제어할 수 있도록 하며, 타 시스템과 호환 가능하고 유지보수 용이하며 에너지 절약적 설비 계획 수립 [에너지 절약시스템 및 에너지 절약형 기기에 대한 에너지 절감량 및 환경부하 저감량에 대한 정량적 분석결과(예, 00% 절감 등)를 제시]

자동제어 일반사항

㈀ 개방형 프로토콜(BACnet, LonWorks 등) 사용으로 향후 증설, 변경및 통합을 위한 시스템 개방성

㈁ 그래픽 환경에서 감시 및 제어

㈂ 모든 운영의 예약운전 제어기능

㈃ 각종 장비의 운전기록 취합 및 분석

㈄ 편집프로그램, 데이터저장 및 직접디지탈제어기 데이터베이스의 자료다운로드 다중화면을 제어할 수 있는 멀티 태스킹(Multi-Tasking) 환경

㈅ 열원장비, 공조장비, 펌프, 팬, 항온항습기 등 중요 장비에 대한 가동시간(Run Time) 적산

㈆ 직접 디지털 제어기(DDC) 기능

㈇ 분산처리와 자체 진단기능 및 비정상 전원 인입시의 보호기능

㈈ 내장 프로그램 및 통신기기의 호환성

㈉ 중앙처리장치와 통신두절시 자체적인 장비의 운전이 가능(Stand Alone)

㈊ 전원단절 시 내부프로그램 손실방지 및 써지 차단기능 등 정전에 대비한 계획장비의 이상발생 시 문자 및 음성 통보기능

㈋ 소프트웨어(Software)의 기능

㈌ 메뉴방식의 편리한 운용

㈍ 경보발생의 저장 및 알림기능

⒜ 각각의 아날로그 및 디지털 포인트 관제점의 추이 기록 및 저장

⒝ 각종 프로그램 보정용 휴대용 조작터미널 포함

⒞ 에너지 절약 시스템(EMS) 도입

⑹ 전기분야 계획

① 건축물에 필요한 사항을 반영한 최적의 시스템으로 구성하여 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 및 변화가능성 반영에 중점을 두어 계획하고, 시설통합관리시스템을 적용하여 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립(쾌적하고 환경 친화적인 설비 지향)

② 전기설비 시설 공간의 계획은 최적의 시스템으로 계획

③ 건축시설물과 전기설비의 설치 목적에 적합하도록 전력인입, 수변전설비, 예비전원설비, 전력간선설비, 동력설비, 전등 설비, 전열설비, 피뢰 및 접지설비, 신・재생에너지 설비 및 기타 해당시설에 필요한 전기시설을 관계 법령 및 기술기준에 적합하게 계획

④ 모든 공간은 비상시 탈출 용이성 및 주요시설의 안전성 확보를 위해 적정 규모의 조명 및 전원을 비상전원으로 공급

⑤ 방재설비는 건축적 방화계획과 기계설비의 소화계획 및 전기방재 계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획(통합관제실에서 통합운영)

⑥ 전기설비로 인한 화재나 폭발의 위험성이 없고, 감전사고가 없도록 안전하게 설계

⑦ ｢신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법｣에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리 등)을 비교·검토하여 최적의 시스템을 설계에 반영

⑧ 전기실은 유지관리를 고려해 충분한 공간을 확보하고, 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 안전하게 구획하여 계획

⑨ 전기실의 바닥높이는 기계설비실의 바닥레벨보다 높게 하고, 배수 및 환기시설을 계획

⑩ 수배전반은 계측 및 보호계전 등이 전자화된 배전반으로 시설, 전력설비를 중앙제어 및 감시가 가능하도록 계획

⑪ 부하의 증설에 대비한 시스템을 계획

⑫ 전기실은 부하의 중심에 가깝고 배전에 편리한 장소이며 외부로부터 전원의 인입이 편리하고 기기의 반입, 반출에 지장이 없도록 설계

⑬ 주요시설은 예비전원 설비를 확보하여 경기장 운영 장비, 조정실, 전산, 통신설비 등은 일정 기간 무정전시스템으로 운영되도록 반영

⑭ 수변전설비는 내선규정에 의한 정식수전설비로 직강하방식을 적용하며, 변압기 Bank 구성은 용도별, 부하별로 구성 하여 효율적인 운전이 가능하도록 계획

⑮ 동력설비의 동력반은 소방부하, 계절부하, 일반부하, 비상부하 등으로 구분하며, 부하의 중심부 또는 감시 및 조작이 용이한 장소에 두어 이용의 편리성을 고려하고, 이상시 사고 대처가 신속히 이루어지도록 계획

⑯ 모든 전력설비와 계기류, 차단기류, 계전기류에 대한 제어, 계측, 감시 기능의 자동화를 구축하여 건물 내의 주요설비 및 장비류가 안정적이고 지속적으로 운전이 가능하도록 시스템을 계획

⑰ 모든 전기자재는 최신 규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고, 허용전류, 기계적강도, 단락전류 및 전압강하 등을 충분히 고려하여 설계

⑱ 모든 기기 및 부품은 KS 표시품 또는 검정품으로 설계해야 하며, 이 외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 최상의 자재를 선정

⑲ 각 시설의 기능 및 특성을 충족하고, 제품 성능의 신뢰성이 보장된 신기술 제품 및 ｢친환경상품 구매촉진에 관한 법률｣에 적합한 친환경 제품을 우선 적용

⑳ 신기술 신공법 및 우수자재를 적용하여 친환경 및 신재생에너지 설계 적용

에너지이용합리화법 및 관계법규에서 규정한 에너지절약형의 설계를 우선 적용하며, 전기기기는 고효율 에너지기자 재인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품을 우선 구매

조명설비는 건물의 기능 및 분위기를 충분히 검토하여 조명방식을 계획하고, LED 조명기구를 적용하며 특히 건축 실내디자인 및 해당시설과 조화를 이루도록 계획

조명설비는 조도범위, 눈부심방지 등에 대한 고려와 실내디자인 계획을 충분히 검토하여 모든 이용자가 쾌적함을 느끼도록 계획하며, 교환이 용이한 에너지절약형 제품을 적극 사용

건물 미관이나 조형물, 수목, 상징물 등을 위하여 옥외 경관조명을 설치하는 경우에는 반드시 LED조명으로 계획

조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화 있게 배치되어야 하고, 보수·교환이 용이하도록 계획

조명기구는 필요 조도에 따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하여 설치하여야 하고, 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분 점멸이 가능하도록 설치

과전압 내성이 작은 통신기기 및 통신전원공급 분전반은 서지로부터 보호될 수 있도록 서지 보호기(TVSS, SPD 등)를 설치

각종 노이즈(서지, 고조파, 전압강하 등) 및 전원 신뢰성 문제를 포함한 종합적인 전력품질 향상 대책이 이루어지도록 계획`

전력 인입선로는 지중으로 계획하고, 인입 위치는 현장조사 및 관련 공급기관과 협의하여 계획하고, 관련규정에 문제없도록 설계 및 장비 반입 대책을 고려

토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려

향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 함

전체 시설물의 소요전력 용량 및 설비를 검토한 후 전기설비기술 기준에 적합하게 설계

향후 전력설비 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조변경이 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 함

전기용 EPS(Electrical Piping Shaft)실과 정보통신용 TPS(Telecommunication Piping Shaft)실을 별도로 계획 하며, 유지관리에 용이하도록 배치

건물 내･외부 및 주차장 등 요소요소에 안전사고 대비와 자료훼손․유출 등의 방지목적으로 CCTV를 설치하도록 설계

자동제어설비 전기제어는 수전설비의 역률, 전압, 전류, 전력량 등 모니터링 및 일지작성 기능을 수행할 수 있도록 설계

EPS는 간선수납 및 기기설치에 충분한 공간을 확보하여야 하며, 전선의 인출이 편리한 장소이어야 함

각층 부하의 중심에 EPS을 계획하고 간선수납 및 기기설치에 충분한 공간을 확보하여야 하며, 통신용 TPS는 별도로 설치

접지설비는 최신 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 안전과 기능을 모두 충족할 수 있는 최적의 시스템이 구현될 수 있도록 계획

피뢰설비는 최신 관련법규 및 규정에 적합하게 시설하여 직접적 낙뢰 피해 및 간접적 피해에 대하여 고려

관련 법규에 따라 주차장에 전기차 충전시설 설치

스마트 조명제어 시스템 계획

공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 부합한 전기시설 반영 계획(에너지저장장치(ESS), 대기전력자동차 단, LED조명 등)

전력간선은 향후 부하증가를 고려하여야 계획하고, 전력공급(상시 및 비상시) 및 유지관리에 용이하도록 전력간선계 통을 구성 계획

전열설비(콘센트 등)는 사용장소 및 환경에 적합한 방식으로 계획하고, 충분한 전원시설 확보와 대기전력차단(원격제어시스템 등) 기능이 되도록 하며, 특히 업무공간의 향후 가변성(증설, 변경)에 대응하도록 계획

동력설비, 소방설비 및 각종 기기·장비의 전원공급에 문제없도록 계획(다목적경기장의 다양한 행사를 위한 충분한 전력 부하 반영)

전산서버장비에는 정전으로부터 전원공급에 차질이 없도록 계획

관계기관 각종 인허가·인증·협의에 문제없도록 전기시설 설계

향후 전기사용 시설을 대비한 적절한 전기시설 계획

⑺ 운영유지관리 및 정보통신 설비계획

① 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계방안을 제시

② 중앙통제 통합관제실은 모든 시설과 연계성을 고려한 적절한 위치선정이 중요하고, 실질적인 안전 및 운영의 중앙 컨트롤타워가 될 수 있는 설계방안을 제시

③ 통합관리가 용이하도록 통합관제실에 통합단말시스템과 모니터링시스템 구축을 위한 설계방안을 제시

④ 통합 SI(System Integration)시스템은 설비자동제어, 조명제어, 전력감시, 주차관제, 시설관리, 통합방범, CCTV, 통합배선, 전관방송, 빌딩안내, AV 등 분산된 시스템을 단일운영환경으로 연동하여 설치하여야 하며, 필요시 경기장(무대) 운영 통합 SI시스템을 검토하여 상호 유기적 제어가 되도록 검토하여 제시

⑤ FMS(Facility Management System)는 시설관리시스템 통합관리를 통한 시설물에 대한 효과적인 유지보수 체계를 갖춤으로써 비용절감, 생산성 향상, 사고예방 등의 효과적 운영환경의 구현으로 시설관리업무의 효율성을 높이도록 계획

⑥ 모든 시설 및 시스템은 FMS와 유기적으로 연동되어 실시간 감시 및 제어, 관리비용 및 에너지절감효과, 합리적이고 효율적인 시설관리가 되도록 함

⑦ 통합 SI시스템은 FMS와의 완벽한 시스템 인터페이스를 구현하고, 실시간 감시 및 제어 뿐 아니라 FMS를 활용하여 관리비용 및 에너지 절감 효과를 거둘 수 있도록 계획

⑧ 정보통신설비의 제반법규 및 기준을 준수하여 계획하되 업무특성을 고려하여 각 공간(경기장 무대 등)간의 통신및 네트워크를 종합적으로 계획[통신인입, 통신설비(전화&랜), TV공청설비, 구내방송설비, A/V설비, CCTV설비 및 기타 해당 건축시설물에 필요한 통신시설]

⑨ 본 시설의 운용관리 및 기능 수행에 필요한 제반 시설을 갖추기 위해 기본적으로 내구성, 에너지 절약형 기자재 사용을 반영한 경제성, 유지관리의 효율성, 운전관리 및 고장복구 등의 조작의 정확성, 안전성, 신뢰도의 확보 등 종합적인 검토 하에 시설 계획

⑩ 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 및 에너지 절약 등을 고려하고, 예산범위 내에서 설계 시점 에서 최신 기종으로 설계

⑪ 각종 설비는 최첨단 기능의 장비 및 기기로서 안전 및 계통보호를 충족시키고 건축물 용도에 맞춰 고유한 기능을 완벽하게 지원토록 계획

⑫ 통신설비는 유지보수에 지장이 없도록 계획되어야 하고, 향후 정보통신 설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각실의 구조변경 없이 설치가 가능하도록 하며, 충분한 작업 공간을 확보

⑬ 통신설비를 지원하는 제반설비 등은 기기배치 및 설치에 문제가 없도록 계획

⑭ 전기용 ES(EPS)와 별도로 주요통신시설(통신실, 전산실)에 축전지 등 예비전원을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보

⑮ 데이터 및 음성·영상 등의 전송이 가능하도록 계획하고 접속장비를 모두 수용하는 유연성 및 호환성을 갖추도록 계획(전용경기장 및 다목적경기장 내의 월BOX에서 외부와 연결(중계차 등 활용 가능하도록))

⑯ 각종 자료, 정보의 관리 및 공유 등을 위하여 데이터베이스 구축을 위한 일체의 장비 및 홈페이지 운영을 위한 웹서버 및 기타 장비 등의 설치를 위한 충분한 공간의 설계 반영

⑰ 전관방송, CATV, CCTV, 옥외보안등 및 외곽 방범설비도 통합설비계획에 포함하여 계획

⑱ 통신실 위치는 누수·침수의 피해를 입지 않도록 선정하고, 인입관로를 고려하며, 통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련기관과의 협의를 통해 계획

⑲ 정보통신 인입선로는 지중으로 계획하고(인입관로 이중화 계획 고려), 인입 위치는 현장조사 및 관련 공급기관과 협의하여 계획하고, 관련규정에 문제없도록 설계

⑳ 각 기능별, 실별로 부합하는 정보통신 및 전산부문의 수용에 용이하고 충분한 통신회선을 구성하여야 하며, 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 포함하여야 함

통신 MDF시설은 통신 및 랜 시설을 수용할 수 있도록 충분한 공간 확보

각종 통신 및 제어용케이블은 유도장애에 대한 대책이 있어야 함

에너지 이용 효율화 및 에너지 절감을 위한 EMS 이용(필요 시)

통합배선시스템은 초고속정보통신 환경으로 구축하고, 내부 업무(행정)망, 외부 인터넷망, 비상통신용으로 배선망을 물리적 분리 계획(민원용, 인터넷망(공공WiFi) 이용 가능하도록 구성 고려)

통합배선설비(전화&랜)는 사용장소 및 환경에 적합한 방식으로 계획하고, 충분한 통합배선시설 확보와, 특히 업무공간의 향후 가변성(증설, 변경)에 대응하도록 계획

전관방송시스템 구축 및 각 실에 방송(음향, 영상 등) 송출과 시청이 원활히 이루어지도록 계획

시설보안을 위하여 CCTV설비를 적절하게 계획

미래 지향적인 스마트오피스 환경에 적합한 통신시설 계획

관계기관 각종 인허가·인증·협의에 문제없도록 통신시설 설계

향후 통신사용 시설을 대비한 적절한 통신시설 계획

(8) 조경계획

① 예산 범위 내에서 실현가능하도록 디자인, 식재계획, 외부지장물 등의 과도한 계획을 지양하며, 합리적인 설계안을 제시

② 주변지역의 특성(생태면적율 등)과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하며 상호 이질감이 없도록 건물의 성격에 조화되도록 계획

③ 아산시 조경조례 및 주변경관과 조화를 이루는 식재 계획, 특히 수목을 활용한 외부공간계획을 적극 고려

④ 주위환경을 고려한 녹지공간을 충분히 조성하고, 유지관리가 용이한 식생계획

⑤ 건물 및 주변 환경과 조화되도록 친환경적인 공간개념으로 계획하고, 인공지반 녹화 및 실내조경 도입 등을 제안하되 유지관리성을 고려

⑥ 주변 가로의 흐름과 연계된 쾌적한 보행로 녹화 계획

⑦ 조경면적, 수종, 규격, 상록․낙엽 비율, 식재밀도, 수급관계, 수목특성 등을 고려

⑧ 수종의 선정, 배치, 조경포장 및 조경시설물 등은 상호 조화되도록 하고 기능성을 최대한 고려하며, 각종 시설물은 일관된 디자인 요소를 갖추어야 함

⑨ 시설물의 재료는 질감 및 내구성이 좋은 환경친화적 재료로 설계

⑩ 포장재료, 녹지조성, 조경시설물 등은 친환경적인 소재로 계획

⑪ 대상지 내 자연환경과 연계하여 생태계 보전과 에너지절약 효과를 극대화 할 수 있도록 계획

⑫ 우수 활용을 위한 저류시설 개념의 시설을 도입하여 조경용수 등의 활용을 검토

⑼ 소방 및 방재 계획

① 소방․방재관계법령 및 화재안전기준 등에 적합하며, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 고려하여 신기술/ 신공법 제안과 중앙제어가 가능하도록 계획

② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령의 기준에 의하여 건축물의 용도 및 규모에 맞는 소방 시설을 적용

③ 법적 설치대상은 아니나 기능상 필요하다고 인정되는 경우, 자진설비로서 소방시설을 적용할 수 있음

④ 관련 규정에 따라 성능위주 소방 설계대상이 아닌 경우에도 화재 및 피난 시뮬레이션을 실시하여 그 결과를 설계에 반영

⑤ 소방설비는 건물의 각 부분의 구조 및 용도에 따라 화재의 발생, 화재의 확대 및 인명피해 가능성을 평가하여 화재를 사전에 예방하고, 화재가 발생할 경우에는 초기에 탐지하여 진압할 수 있도록 설계

⑥ 장비 및 기기는 국가인정품(KS제품 또는 국가 검정품) 또는 이와 동등 이상으로 인정되는 것을 적용하여 계획

⑦ 피난 계획은 평면․단면, 내장계획, 구조계획 시 검토하여 화재의 연소 및 확대를 방지할 수 있도록 계획

⑧ 소방시설은 화재의 조기경보, 초기소화, 본격소화, 피난, 구조구급 및 유지관리를 고려하여 계획하며, 시각 및 청각등 장애인을 고려하여 관련법규에 적합한 소방설비로 계획

⑨ 소화수로 사용될 물의 공급과 각종 시설을 운전하기 위한 전원의 공급을 고려하여 계획하고, 옥외에 설치하는 소화수 공급용 주 배관을 화재․폭발 등으로부터 안전하게 보호되도록 설계

⑩ 소화설비는 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 이산화탄소소화설비, 청정소화약제소화설비, 옥외소화전설비를 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 선정하되, 효과적인 소화작업을 수행할 수 있도록 계획

⑪ 가스계 소화설비는 인체에 무해하고 소화성능이 우수한 친환경 설비를 적용하고 3D 설계도면 및 계산서를 실시설계시 제출하여야 한다.

⑫ 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하고 피난경로는 간단, 명확하게 계획하고 가급적 2방향 이상의 피난경로를 계획

⑬ 전기실, 서버실, UPS실 등의 실과 전산기계실, 통합관제실 등 사람이 거주하는 장소에는 약제방출로 인한 인명피해를 최소화하도록 청정소화약제 소화설비 적용

⑭ 전산장비, 자료가 보관되어 있는 실은 소화진압 약재 등으로 인한 2차적 손상을 방지하도록 고려하고, 화재가 발생한 타 지역의 소화활동으로 인한 소화용수가 유입되지 않도록 계획

⑮ 강진 발생에 대비한 내진설계(건축, 전기/수배전반, 발전기, 간선 등)를 하여 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보

⑯ 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기계 설비) 및 건축 비(⾮)구조 부재(구조 체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 계획

⑰ 통합관제실은 비상시 모든 운영체계를 일원화하고 운영의 효율을 기할 수 있어야 하며, 재해 발생 시 소화 및 피난 등 총괄 지휘업무 수행에 지장이 없는 위치에 계획

⑱ 각 설비는 통합관제실에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 계획

⑲ 비상경보설비 및 자동화재속보설비는 소방관련법령, 국가화재안전기준(NFSC)을 적용하여 계획

⑳ 방재설비는 건축적 방화계획과 기계설비의 소화계획 및 전기 방재 계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획

시각 및 청각 등 장애인을 고려하여 관련법규에 적합한 소방설비

비상방송설비는 소방관련법령, 국가화재안전기준(NFSC)을 적용하여 계획하고 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로와 해당 층 및 구역을 구성

비상조명등설비는 소방관련법령, 국가화재안전기준(NFSC)을 적용하여 계획

소방펌프는 전동기에 의해 작동되어야 하고 비상전원 공급은 발전기에 의하며, 완강기 등 피난에 대한 설계

감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법 규정에서 정한 적합한 감지 기(아날로그감지기 적용)로 설치하되 특수용도의 실에는 특수감지기를 고려하며, 화재수신반은 R형 시스템으로 계획 하고 별도로 감시반을 계획해야하고 감시반의 컴퓨터는 시중에 유통되는 최상의 규격으로 모니터는 22인치 LED 이상으로 설계

방화구획은 평면․단면 계획, 내장계획, 구조계획 시 검토하여 화재의 연소 및 확대를 방지할 수 있도록 계획

전선관, 케이블, 버스덕트, 배선덕트가 방화구획을 관통하는 경우에는 관통부를 통해 화재의 화염, 열, 연기가 이동 하지 않도록 방화재로 충진

소화활동 설비는 제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비를 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되, 화재를 진압하거나 피난 또는 인명구조 활동을 위하여 사용하는데 적합하도록 설계

관계기관 각종 인허가·인증·협의에 문제없도록 소방시설 설계

⑽ 재료 및 색채계획

① 사용자재는 국산 K·S 규격품을 기준으로 하되 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보 수가 용이한 재질 및 마감을 고려하며, 전체적인 색채가 조화를 이루도록 계획(마감재·색채디자인 계획서를 통한 발주처와 협의)

② 시공성, 경제성을 고려하여 자재를 선정하며, 인체에 유해한 자재를 사용할 수 없으며 자연친화적인 자재를 우선하여 계획

③ 화재예방을 위하여 불연자재 및 준 불연자재를 사용하는 등 소방법, 건축법, 지방조례 등을 감안하여 자재를 계획

⑾ 각종 안내판 등 계획

① 준공표지판 및 준공표지석

- 준공표지판 및 준공표지석은 본 사업에 관련된 주요 사항을 간략히 표현하되, 본 사업 참여자가 명시되어야 하며, 내용, 설치위치, 재질, 규격 및 글씨 등은 감독관과 협의하여 결정

② 내‧외부 각종 안내판

㈀ 안내판은 내부 종합안내판, 외부 종합안내판, 시설표지판, 유도표지판 등 으로 구분 설치

㈁ 각종 안내판은 이미지나 글씨를 사용하여 공간을 쉽게 찾을 수 있고 오래 기억되도록 유도(네이밍, 픽토그램, 색채 등을 이용)

㈂ 식별성, 대표성이 있는 글씨체를 도입하고 통일성을 유지시키며 안내판의 재료는 내구성, 내부식성을 지닌 재료로 계획하고, 규격 및 글씨 등은 감독관과 협의하여 결정(무료 배포 서체 중 선택)

㈃ 내부 종합안내판은 층별 실 등 내부 안내사항을 명기하여 출입구에서 인지성이 양호한 장소에 설치

㈄ 외부 종합안내판은 안내지도(건축물, 도로, 기타 주요 시설표기)를 명기하여 보행자의 인지성이 양호한 지역에 설치

㈅ 시설 표지판은 통행인이 현 위치를 인지할 수 있는 결절점에 주요시설의 명칭, 방향 등을 표기

㈆ 유도 표지판은 출입구 부근 보행자 및 차량에서의 식별이 가능한 위치에 설치

㈇ 각종 안내판은 장애인의 이용이 용이하도록 설치하고, 유도표지판은 장애인 유도 설비 안내에 맞게 설치하며, 장애물 없는 생활환경 기준에 따라 시각장애인을 위한 음성안내 시스템을 설치

㈈ 직원 및 방문객이 많은 곳에 디지털 스크린을 설치하여 신속하고 다양한 정보를 전달(종이제작물 지양)

⑿ 국기게양대

① 오르내림이 용이하도록 하고 재질은 SUS 또는 동제 제품으로 견고하게 설치

② 국기게양대는 대한민국 국기법, 시행령의 기준에 맞게 계획

3.4 설계진행 시 유의사항

⑴ 신‧재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 계획서를 작성하여 한국에너지공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

⑵ 사무실에 필요한 집기류 등의 임대비용은 사업의 규모/기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

⑶ 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

⑷ 상수도 등 기존(계획) 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

⑸ 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서 작성하여 설계한다.

⑹ 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 발주기관과 사전협의 후 설계에 반영하여야 한다.

⑺ T.B.M(가수준점)을 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

⑻ 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

⑼ ｢건설현장 축중기 설치지침 (국토해양부 훈령 제325호)｣에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

⑽ 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지반조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해 배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지반조사, 분석하여야 한다.

⑾ 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

⑿ 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영한다.

4. 설계도서 작성요령

4.1 공통사항

⑴ ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

⑵ 설계도서 작성 시 제출서류 및 납품도서는 BIM 데이터를 활용하여 작성할 수 있다.

⑶ 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

⑷ 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

- 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개

⑸ 설계자가 작성‧제출하는 시방서 안내

① 설계자가 작성‧제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임11, 12 참고)

② 작성방법은 표준시방서(국토교통부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요‧핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성‧제출한다.

③ 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

⑹ 설계비를 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣ “중급”으로 산정하였으므로, 제출도서는 동 기준 별표 2에 따른 “중급” 기준에 따라 작성하고 제출하여야 한다.

⑺ 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

⑻ 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 별도 작성(시방서 포함)하여야 한다.

4.2 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

⑴ 수급인은 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 함

⑵ 수급인은 계약체결 시 수요기관의 단계별심사용 체크리스트를 감독관에게 전산파일을 지급받아 작성 후 제출

⑶ 체크리스트의 서류작성 프로그램은 EXCEL로 작성하여야 함

⑷ 자료제출은 EXCEL로 작성된 USB 1개 및 A4 좌철제본 책자 3부 제출

⑸ 수급인은 체크리스트 “세부검토내용”에만 작성(대안제시를 포함하여 구체적으로 작성하여야 하며 도면번호를 기재할 것)

4.3 설계도서 표기

⑴ 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

⑵ 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

⑶ 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

① 건축도면 : A

② 건축구조도면 : S

③ 토목도면 : C

④ 조경도면 : L

⑤ 기계설비도면 : M

⑥ 전기도면 : E

⑦ 통신도면 : ET

⑧ 소방도면 : F (필요에 따라서 기계소방 : MF, 전기소방 : EF)

⑨ 인테리어도면 : IA

4.4 도면작성

⑴ 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

⑵ 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

⑶ 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

⑷ 설계도면에는 참여기술자가 서명날인하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여 기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

⑸ 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

① 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

② 각종 부착시설물의 표시

③ 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

④ 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

⑤ 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4.5 계획설계

⑴ 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관 분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경, 통신, 소방 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

⑵ 일반사항

① 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

② 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

③ 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

⑶ 계획설계(안) 작성 시 포함사항

① 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등

② 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

③ 대지 내 동선계획, 주차계획(전체 주차대수 산출근거 포함)

④ 우‧오수처리계획

⑤ 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

⑥ 조경계획

⑦ 개략공사비 산정내역

⑧ 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

⑷ 현장조사방법

① 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

㈀ 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자 치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

㈁ 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설(예정)물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음‧진동, 주변 공사현장 (지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영‧보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상‧하수도, 오‧폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사하여 해당 기관과 협의 후 설계에 반영한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

② 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성‧제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부 하여야 한다.

4.6 중간설계

⑴ 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화 하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주 기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

⑵ 일반사항

① 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정‧보완 지시서에 따라 작성한다.

② 계획설계 위치를 기준으로 지반조사계획서에 근거한 지반조사를 실시한다.

③ 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

④ 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

⑤ 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자 료, 참고도면을 첨부한다.

⑥ Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조, UPS실 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

⑶ 지반조사

① 일반사항

㈀ 지반조사에 필요한 천공비, 전문가 용역비 등 모든 비용은 예정 설계비에 포함되었으며,  지반조사와 관련한 기술적 사항((조사일시, 방법, 기간, 위치, 공수)에 대해서는 발주기관의 협조요청에 따라 협력한다.

㈁ 현장 시추 작업 시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자 또는 참여기술자가 참석하여야 한다.

㈂ 지반조사보고서에 따라 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야 한다.

⑷ 설계서 구성

① 건축

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반 영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

㈁ 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

㈂ 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

㈃ 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

② 토목

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

㈁ 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성검토서

㈂ 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

㈃ 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

③ 조경

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

㈁ 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

㈂ 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

④ 기계설비

㈀ 설계 설명(보고)서

- 설비 개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

㈁ 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

㈂ 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

㈃ 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

⑤ 전기설비

㈀ 설계 설명(보고)서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

㈁ 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

㈂ 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

㈃ 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

⑥ 정보통신설비

㈀ 설계 설명(보고)서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

㈁ 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

㈂ 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

㈃ 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

4.7 실시설계

⑴ 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계 도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

⑵ 일반사항

① 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

② 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

③ 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

④ 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

⑤ 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

⑶ 설계서 구성

① 건축

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항(건축모형 100:1)

㈁ 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

㈂ 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력*을 산정하여 준공표지판에 공개**하도록 필히 기술

* 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력

** 내진능력은 수정 메르칼리 진도 등급(MMI 등급)과 최대지반가속도를 함께 표기(예시 : Ⅶ-0.150g)

㈃ 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/200정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/200정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면[의장(인테리어) 도면 등]

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

㈄ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

② 토목

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

㈁ 구조 및 수리계산서

㈂ 지반조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

㈃ 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈄ 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

㈅ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

③ 조경

㈀ 설계 설명(보고)서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

㈁ 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈂ 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

㈃ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

④ 기계설비

㈀ 설계 설명(보고)서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토 내용, 간단한 운전요령서 등

㈁ 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈂ 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

㈃ 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 옥외 배관 관망도(기계,전기,통신,소방,오수,우수등 옥외매립배관

- 전체 위치를 표기한 도면)

- 기타 필요한 도면

㈄ 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

⑤ 전기

㈀ 설계 설명(보고)서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

㈁ 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서, 예비전원설비 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

㈂ 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈃ 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 무대조명설비의 계통도,배치도,결선도 등 시공에 필요한 사항 일체(공사비산출서 별도)

- 기타 필요한 도면

㈄ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

⑥ 정보통신

㈀ 설계 설명(보고)서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

㈁ 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

㈂ 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈃ 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 중계실 외부방송(송출)설비, 무대음향시스템의 계통도,배치도,결선도 등 시공에 필요한 사항 일체(공사비산출서 별도)

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

㈄ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

⑦ 소방

㈀ 설계 설명(보고)서

- 소방설비 개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

㈁ 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

㈂ 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

㈃ 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별 작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

㈄ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5. 설계도서 납품목록

5.1 계획설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비고
1	계획설계(안)	A1	4	부	개략적 조감도 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설 견학보고서 포함
3	현황측량보고서		4	부	현황측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인
※ 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB로도 제작하여 제출 ※ 설계 도면은 A1제출을 원칙으로 하되 발주기관과 협의, 승인받아 A3로 제출할 수 있음

5.2 중간설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계설명(보고)서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○
2	설계 도면	A1	3	부	○	○	○	○	○	○	○	전 공종 분리
3	내역서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○	공사비
4	계산서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○
5	시방서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○	전문, 관급시방 포함
6	녹색건축물 인증 관련 검토서	A4	3	부
7	제로에너지건축물 인증 관련 검토서	A4	3	부
8	장애물없는 생활환경인증(BF) 관련 검토서	A4	3	부
※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다. ※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다. ※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출(설계도면은 PDF포함) ※ 설계 도면은 A1제출을 원칙으로 하되 발주기관과 협의, 승인받아 A3로 제출할 수 있음

5.3 실시설계 납품도서

⑴ 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○	1부로 작성
2	설계 설명(보고)서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○
3	원도	A4	1	부	○	○	○	○	○	○	○	발주기관 요구시
4	설계도면	A1	7	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이
		A3	7	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이
5	계산서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○
6	내역서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○	관급내역서 포함(별도 제본)
7	수량산출서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○
8	단가산출서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○	견적서 포함
9	일위대가표	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○
10	공사시방서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○	관급시방서 포함
11	특기시방서	A4	7	부	○	○	○	○	○	○	○
12	조감도		3	부	○							건축모형(100:1)
13	공정표		1	부	○	○	○	○	○	○	○	전공종 포함
14	USB		7	SET	○	○	○	○	○	○	○	계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
15	녹색건축물 예비인증서
16	제로에너지건축물 예비인증서
17	장애물없는 생활환경 예비인증서, 에너지절약계획서 관련 증빙 자료
18	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
19	자재 견본 자료	A4	2	SET	○	○	○	○	○	○	○
20	기타 발주기관 요구사항				○	○	○	○	○	○	○	설계의 안정성 검토서 (해당 시), 지방건설 기술심의위원회 심의 관련 자료, 입찰안내서, 공사기간 산정 등

① 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 USB로 제출

② 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

③ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

④ 제로에너지건축물 예비인증서, 장애물없는 생활환경인증서 (보완사항이 없을 경우)는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음.

⑤ 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 에너지 절약계획서 관련 증빙서류

⑵ 종결보고서

－ 종결보고서에는 설계 설명(보고)서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계 획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

⑶ 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

⑷ 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

① 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비 예산 (장기계속 계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

② 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계 자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

⑸ 조감도(A1 이상으로 규격은 사전에 협의하여 결정, 표구 포함) 3부

⑹ 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

⑺ 기타 발주자가 요구하는 성과품. 끝.

■ 붙  임

[붙임 1] 보안각서

보 안 각 서
1. 용 역 명 :	충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약일자 :	20 . . .
3. 착수일자 :	20 . . .
4. 완수예정일 :	20 . . .
본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다. 1. 본인은 본 용역수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다. 2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다. 3. 본인은 지방계약법시행령 제15조 제1항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 지정정보처리장치에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수있다는 데에 동의한다. 4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제 2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다. 5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다. 6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 은 관계 법령에 따른다.
20 년 월 일
		주 소 :
		주민등록번호 :
		기 술 분 야 :	참여공종 표기
		성 명 :	(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 2] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계
1. 용 역 명 :	충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 :	일금 원 (￦ )
3. 계약일자 :	20 . . .
4. 착수일자 :	20 . . .
5. 완수예정일 :	20 . . .
- 아 래 -
가. 성 명 :
나. 주 소 :
다. 주민등록번호 :
라. 기술자격(면허)종별 :
상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다. 붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부 20 년 월 일
		계 약 자
		주 소 :
		상 호 :
		대 표 자 :		(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 3] 하도급승인 요청서

하도급 승인 요청서
1. 용 역 명 :	충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 :	일금 원 (￦ )
3. 계약일자 :	20 . . .
4. 착수일자 :	20 . . .
5. 완수예정일 :	20 . . .
- 아 래 -
가. 하도급분야 :			(토목설계, 건축구조설계, 건축기계설비 기타 등)
나. 하도급자
- 주 소 :
- 상 호 :
- 대 표 자 :
- 보유면허 :
붙 임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부 2. 하도급계약서 사본 1부 3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부
상기 자에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일
		계 약 자
		주 소 :
		상 호 :
		대 표 자 :		(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 4] 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명	충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토 내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 기술용역(설계)계약특수조건 제5조

[붙임 5] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원
1. 용 역 명 :	충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 :	일금 원 (￦ )
3. 계약일자 :	20 . . .
4. 착수일자 :	20 . . .
5. 완수예정일 :	20 . . .
붙 임 : 납품설계도서 목록 1부
(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.
20 년 월 일
		계 약 자
		주 소 :
		상 호 :
		대 표 자 :	(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 6] 주간공정보고

주간공정보고
1. 용 역 명 :		충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 :		일금 원 (￦ )
3. 계약일자 :		20 . . .
4. 착수일자 :		20 . . .
5. 완수예정일 :		20 . . .
■ 용역진행사항
구분	전주진행사항			금주예정사항		비 고 (진행률)
	(20 . . )			(20 . . )
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성					실시공정/ 예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
20 년 월 일
			계 약 자
			주 소 :
			상 호 :
			대 표 자 :		(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 7] 월간공정보고

월간공정보고
1. 용 역 명 :		충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 :		일금 원 (￦ )
3. 계약일자 :		20 . . .
4. 착수일자 :		20 . . .
5. 완수예정일 :		20 . . .
■ 용역진행사항
구분	월간 업무수행 내용				비 고 (진행률)
	20 . . . ~ 20 . . .
첫째주					실시공정/ 예정공정(%)을 표기
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
특기사항	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기
20 년 월 일
			계 약 자
			주 소 :
			상 호 :
			대 표 자 :	(인)
(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

[붙임 8] 특정자재 사용 목록

특정자재 사용 목록
용 역 명 :		충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 기본 및 실시설계 용역
품 목	규 격			물량	금액(천원)		사 유
※ 1. 관급자재 제외 2. 품목당 100만원 미만 제외
20 년 월 일
			확 인 자
			사업책임기술자 :			(인)

[붙임 9] SPACE PROGRAM (예시)

< 충남 이스포츠 상설경기장 건립 사업 설계 면적표 >
구분		㎡	평	비 고
※ 기준 연면적의 ±3% 범위내에서 자유로운 제안이 가능하며 확장 계획을 장려한다.

[붙임 10] 표준설계관리일정표 (예시)

[붙임 11] 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

[붙임 12] 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것